제126회 울산광역시 북구의회 임시회

(2011. 5. 30.)

행정사무 처리상황 보고

울산광역시 북구

문화홍보과

천곡문화센터 건립

제126회 북구의회 행정사무 처리상황 보고	-  -

□ 사업개요

○ 위    치 : 천곡동 266-3번지 외 6필지

○ 시설규모 : 부지면적 1,735㎡, 연면적 1,230㎡, 지상 4층

○ 사 업 비 : 4,095백만원

○ 사업기간 : 2009. 2월 ~ 2012. 6월

○ 시설내용 : 민원실, 대회의실, 다목적실, 체력단련실, 문화사랑방, 청소년문화공간 등

층별	시 설 배 치(안)	비 고
1층	민원실, 정보자료실, 장애우교실, 부대시설	※ 부대시설 : 화장실, 로비, 계단, 엘리베이터
2층	다목적실, 문화사랑방, 부대시설
3층	체력단련실, 문화창작실, 부대시설
4층	공연연습장, 음악연습실, 부대시설, 옥상정원

□ 추진현황

○ ‘09.  3월. : 지방재정투․융자 심사

○ ‘09.  3월 : 공유재산관리계획 심의

○ ‘09.  8월 : 도시계획(문화시설)시설 결정

○ ‘09. 10월 : 중기지방재정계획 반영

○ ‘10.  4월 : 특별교부금 확보(500백만원)

○ ‘10.  5월 : 토지보상 완료

○ ‘10.  8월 : 특별교부세 교부(1,000백만원)

○ ‘10.  8월 ~ 9월 : 주민의견 수렴(농소3동 주민설문조사 및 설명회)

○ ‘11.  1월 ~ 4월 : 설계공모(※ 당선업체 : 울산시상건축사사무소)

○ ‘11.  5월 : 기본 및 실시설계용역

○ ‘11.  8월 : 공사 착공 예정

○ ‘12.  6월 : 공사 준공 예정

□ 문 제 점

○ 토지감정가 상승으로 인하여 부지보상비 증가

○ 시설규모 확장으로 인하여 공사비 추가 확보 필요
∙ 시설규모 확장 사유 : 당초 3층 예정이었으나, 주민의견수렴

결과 4층 증축으로 시설 확장

□ 대    책

○ 부족한 공사비(630백만원) → 추경 확보 예정

○ 주민의견 등 다양한 의견 수렴 → 친환경적이고 주민편익 도모한 시설 건립

□ 천곡문화센터 공모 당선작(조감도)

○ 당선업체 : 울산시상건축사사무소