제132회 울산광역시 북구의회 임시회

현장 방문 활동

[ 천곡 한신휴플러스 절개지 현장 안전대책 ]

울산광역시 북구의회

건축주택과

천곡 한신휴플러스 절개지 현장 안전대책

□ 사업개요

○ 시행․시공사 : (주)한신공영 대표 태기전

○ 위    치 : 천곡동 512-6번지 일원 (부지면적 26,775,300㎡)

○ 규    모 : 지하4층 지상12~25층/8개동/527세대

○ 공사진행 내용 (공정률 20%정도)

• 1단지 (벽산블루밍 아파트 인근) : 지상2층 골조공사 진행

• 2단지 (아이파크 아파트 인근) : 지하3개층 골조공사 완료, 보강 구조물 설치

• 진입도로 교량 : 교각 콘크리트 타설 완료(5월 말 시공완료 예정)

※ 아이파크 옹벽 및 가시설 주변 계측 중(경사계, 수위계, 하중계, 건물경사계)

□ 추진현황

○ '08. 05. 16 : 주택건설사업계획승인

○ ‘11. 05. 27 : 주택건설사업 착공

○ ‘12. 02. 11 : 아이파크1차 아파트 주차장 등 균열 발생

○ ‘12. 02. 14 : 공사중지 후 구조안전점검 실시

○ ‘12. 02. 17 : 안전점검 현장 조사결과에 따라 부분공사 재개

※ 균열발생 원인은 지하수위의 일시적 저하로 판단

○ ‘12. 02. 22 ~ 03. 13 : 한신휴플러스 공사관계자 현장회의(3회)

○ ‘12. 05. 07 : 정밀안전진단 업체 선정[산업안전관리(주)]

□ 문제점(민원 등)

○ 균열 피해 및 어스앵커 점용 관련 등 민원 협의 중

□ 향후 추진계획

○ 아이파크 입주자대표회의와 한신공영에서 협의하여 결정한 안전진단업체에서 안전점검을 실시하여 그 결과에 따라 추가 대책 수립

○ 공사 현장의 안전성 확보를 위하여 가시설 보강 구조물을 우선 시공

□ 현장사진

공사현장 전경

가시설 보강구조물(버트레스 옹벽) 시공