	발간등록번호
	57-3720000-000097-10
	2019년 울산광역시 북구의회 행정사무감사
2019년 행정사무 처리상황 보고
			울산광역시 북구

건설과

목      차

Ⅰ.	일반현황
□	기 구 ---------------------------------------------------------------	18 - 1
□	정․현 원 ------------------------------------------------------------	18 - 1
□	분장사무 현황 ----------------------------------------------------	18 - 1
Ⅱ.	예산편성 및 집행현황 --------------------------------------	18 - 2
Ⅲ.	2019년도 주요업무계획 및 실적
□	효율적이고 정확한 국·공유재산 관리 -----------------------	18 - 4
□	이용자 중심의 도로환경 조성 -------------------------------	18 - 5
□	설해대비체계 확립으로 선재적 재난대응 -----------------	18 - 6
□	소방도로 개설로 안전한 주거환경 조성 ------------------	18 - 7
□	구민건강 증진을 위한 자전거인프라구축 -----------------	18 - 8
□	주민 친화적인 쾌적한 하천공간 조성 ---------------------	18 - 9
□	매곡천 친수환경 조성 및 경관개선 --------------------------	18 - 10
□	하수도 정비를 통한 친환경 도시 조성 --------------------	18 - 11
□	안전하고 밝은 안심거리 조성 --------------------------------	18 - 12
□	연암 소류지 하류 소하천 정비 ------------------------------	18 - 13
Ⅳ.	2018년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 --------	18 - 14
Ⅴ.	2018. 10. 1. ~ 2019. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황 -----	18 - 16

Ⅰ. 일반현황

□ 기  구

건설과 18 -

						건 설 과
건설행정담당			토목담당				치수담당				하수담당			기전담당

□ 정·현원                                          (단위  : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	1	6	8	6	4
현 원	23	1	5	5	7	5

□ 분장사무 현황

담 당 별	분 장 사 무
건설행정담당	◦ 국․공유재산관리 및 용도폐지 ◦ 토지 및 지장물 보상 ◦ 도로 점․사용, 노점상 관리 및 단속 등
토 목 담 당	◦ 도로건설사업 종합계획수립 및 시행 ◦ 도로건설 및 유지․보수, 설해대책계획수립 및 시행 ◦ 자전거 이용시설 설치계획 수립 및 시행 등 ◦ 지하안전관리특별법 관련 지하시설물 관리
치 수 담 당	◦ 하천 정비 기본계획수립 및 시행 ◦ 하천 점사용허가 및 하천 유지관리 ◦ 하수도 유지․보수 사업 추진 등
하 수 담 당	◦ 개인하수처리시설설치 협의 및 관리 ◦ 하수도 원인자 부담금 부과 징수 ◦ 하수도 유지, 보수 사업 추진
기 전 담 당	◦ 가로, 보안등 관리 ◦ 배수장 및 하수중계펌프장 유지관리 ◦ 지하수 이용개발 신규확인 및 폐공업무 전반

Ⅱ. 예산편성 및 집행현황

【일반회계】                                                     (단위 : 천원)

정책사업․단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
총 계				12,841,359			7,102,028
	정책사업비			12,538,607			6,999,487
	재무활동			49,434			25,290
	행정운영비			253,318			77,251
		건설행정지원체제강화		374,052			41,999
			건설도시 업무추진	374,052	∙지적측량수수료,공공요금 ∙노점상 노상적치물 정비 ∙미지급용지 보상금	∙노점상 노상적치물 정비 ∙공공요금(우편) ∙미지급용지 보상금	41,999
		도로의 개설 및 유지관리		7,589,888			5,146,641
			도로개설	6,460,664	∙자전거이용활성화 사업 ∙장기미집행도시계획시설 (도로)토지․건물 보상금 및 철거비 ∙소방도로개설	∙자전거이용활성화 사업 ∙장기미집행도시계획시설(도로)토지․건물 보상금 및 철거비 ∙소방도로 개설 보상 및 공사비	4,140,869
			도로 및 도로시설물 유지관리	1,129,224	∙도로정비 및 도로시설물 긴급복구 ∙보도 잡초관리 ∙동별 주민참여예산 소규모사업 ∙설해대비 도로유지관리 ∙과적차량 단속	∙불량도로 정비 및 긴급도로 복구 공사비 ∙도로 안전시설물 관리 ∙재해위험지 정비 ∙제설창고 공공요금 및 유지비, 자재 구입비 ∙과적차량 공공요금 및 유지비	1,005,772
		하수도 정비		431,336			189,641
			하수도 정비	231,336	∙오폐수 관리 ∙하수도 긴급보수 및 준설 ∙하수도 준설 ∙하수중계펌프장 공공요금 및 유지관리비	∙분뇨수집운반 업체 지원 ∙하수도 긴급보수 및 준설 ∙소규모 하수도 구조개선사업 ∙하수중계펌프장 공공요금 및 유지관리비	89,641
			하수관로 보수 및 정비공사	200,000	∙하수관로 보수 및 정비	∙우수관로 보수 및 준설공사 단가계약	100,000

정책사업․단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
		하천정비		1,324,764			830,157
			하천관리	1,222,764	∙하천시설 관리 및 하상정비 ∙효문,명촌 배수장 관리 ∙억새단지 관리 ∙동천 유지관리사업	∙하천둔치관리 기간제 인건비 ∙공공요금 및 유지관리비 ∙억새단지 관리 인건비 ∙하천 제방 및 배수문 정밀점검용역비 ∙동천유지관리사업 인건비	778,129
			하천정비공사	102,000	∙하천 응급복구공사비 ∙생태하천 복원사업비	∙하천 응급복구공사 ∙천곡천 생태하천 복원사업	52,028
		밝고 안전한 거리환경 조성		2,672,640			627,220
			가로·보안등 관리	2,672,640	∙공공요금, 유지관리비 ∙보안등 설치, ∙노후가로등 교체 ∙가로등 점멸기 교체	∙가로보안등 전기요금 ∙가로보안등 유지보수 ∙보안등 설치 ∙노후가로등 교체 ∙가로등 점멸기 교체	627,220
		효율적인 배수장 관리		145,927			61,288
			효율적인 배수장관리	145,927	∙배수장 시설장비 유지비	∙배수장 공공요금	61,288
		재무활동		49,434			25,290
			내부거래지출	49,434			25,290
			국.시비 보조금 반환	49,434	∙‘18 보도 잡초관리비 ∙‘16~18 지방하천 유지관리비 ∙‘18 태화강 둔치관리 ∙‘18 동천환경정비 ∙오토밸리 우수박스 확장공사 보조금 반환금	∙‘16~18년도 지방하천 유지관리사업 보조금 반납	25,290
		행정운영경비		253,318			77,251
			인력운영비	147,720	∙인건비 ∙무기계약근로자보수	∙시간외수당 ∙급량비, 출장여비, 피복비	39,421
			기본경비	105,598	∙사무관리비, 국내여비 ∙업무추진비, 직무수행경비	∙사무관리비, 급량비, 출장여비 ∙기관,부서운영업무추진비 ∙직책급업무수행경비	37,830

Ⅲ. 2019년도 주요업무계획 및 실적

효율적이고 정확한 국·공유재산 관리

□ 추진개요

○ 상시적 국·공유재산 실태관리로 활용 가능한 재산 전환

○ 공익사업에 편입된 미지급 도로 발굴 및 정당한 보상

○ 도로점용 관리로 세외수입 확충 및 행정신뢰성 제고

□ 추진실적

○ 국공유재산 관리

∙ 국·공유재산 사용료 정기분 부과 : 3월, 858건, 335,360천원

∙ 국·공유재산 사용허가 : 수시 23건, 13,561천원

○ 도로점용 관리

∙ 도로점용료 정기분 부과 : 3월, 912건, 1,337,473천원

∙ 도로점용 허가 : 수시 375건, 279,657천원

∙ 무단적치물 단속반 운영 : 연중, 4명(청경2, 공익2)

○ 미지급용지 보상

∙보상필지 : 정자동 5필지(906㎡) 8명

∙보상금액 : 313,772천원

□ 향후계획

○ 국·공유재산 및 도로점용 허가 : 수시

○ 무단적치물 단속반 운영 : 연중, 4명

이용자 중심의 도로환경 조성

□ 추진개요

○ 보행자 및 운전자 우선의 편안하고 안전한 도로환경 조성

○ 지속적인 도로 안전시설물 점검·정비로 주민 편익 제고

□ 추진실적

○ 2019년 긴급도로 복구공사 단가계약 추진

∙ 공사 착공 : ‘19. 2. 18. (준공 예정 ’19. 12. 31.)

∙ 상안동 엘림요양원 보도 정비 등 긴급도로 복구공사 추진중

○ 2019년 도로변 풀베기 공사 단가계약 추진

∙ 공사 착공 : ‘19. 6. 11. (준공 예정 ’19. 11월중)

○ 동별 소규모지역사업 추진

∙ 중산동 재성빌라 일원 외 7건 도로정비공사 완료 : ‘19. 6월

○ 도로 및 도로시설물 정비공사 추진

∙ 매곡동 마동마을 일원, 호계9길 일원 등 도로정비공사 시행

(바로소통실, 사이다데이 건의사항 등 시행)

□ 향후계획

○ 긴급도로 복구공사(단가계약), 풀베기 공사(단가계약) 연중 운영

○ 도로 및 도로시설물 정비공사 상시 시행

설해대비체계 확립으로 선제적 재난대응

□ 추진개요

○ 사전 철저한 대비체계 구축으로 신속한 상황 대처

○ 도로 안전성 확보로 주민 생명 및 재산 보호

□ 추진실적

○ 설해집중대비기간 : ‘18. 12. 1. ~ ’19. 3. 15.(완료)

∙ 관내 강설에 따른 제설 작업 시행 : 2회

- ‘19. 1. 31. ~ 2. 1. : 매곡~신흥재 도로, 구국도 31호선 제설작업 시행

- ‘19. 2. 14. : 구국도 31호선 제설작업 시행

○ 제설장비 등 작동상태 상시 점검

∙ 다목적 제설차량 3대, 배토판 20대, 염화칼슘 살포기 20대(자체확보)

○ 도로구간별 제설함 비치 및 제설함 내 용품 보충 : 제설함 252개소

○ “2018년 제설작업차량 임차용역” 시행

∙ 임차기간 : ‘18. 12. 1. ~ ’19. 3. 31.

∙ 임차장비 : 덤프 15톤 2대, 바브켓 1대)

∙ 용 역 비 : 55,200천원

□ 향후계획

○ 2019년도 설해집중 대비기간 전 제설장비, 제설함 등 정비 시행

소방도로 개설로 안전한 주거환경 조성

□ 추진개요

○ 주민 요구도 높은 지역 우선으로 사업의 효율성 검토 후 시행

○ 도시기반시설 확충을 위한 소방도로 조기 개설로 주민만족도 제고

□ 추진실적

(단위 : 천원)

구 분	사업개요	총사업비	사 업 비			추진일정
			기투자	2019	2020이후
계	L=2,950m B=6~12m	35,109	16,501	3,547	15,061
천곡본동 일원 (소1-105호선) 소방도로 개설	L=1,020m B=10.0m	5,000	1,322	530	3,148	∙ 2019 9월. : 보상추진 (현보상률 : 71%) ∙ 2020. 2월. : 공사착공
호계동 수동중앙길 일원 (소2-136호선) 소방도로 개설	L=558m B=8.0m	5,000	1,000	317	3,683	∙ 2019. 9월. : 보상추진 (현보상률 : 41%) ∙ 2020. 2월. : 공사착공
중산동 이화초교 일원 (소1-54호선) 소방도로 개설	L=450m B=10.0m	1,600	1,000	100	500	∙ 2019. 6월. : 보상추진 (현보상률 : 100%) ∙ 2020. 2월. : 공사준공
연암동 무룡고교 일원 (중3-73, 중3-94호선) 소방도로 개설	L=538m B=12.0m	7,030	2,000	1,300	3,730	∙ 2018. 6월 : 공사진행 (현공정률 : 70%) ∙ 2019. 12월 : 공사준공(1구간) ∙ 2021. 12월 : 공사준공(2구간)
무지개아파트 일원 (소2-96호선) 소방도로 개설	L=330m B=8.0m	5,000	1,000	-	4,000	∙ 2019. 6월. : 보상추진 (현보상률 : 50%) ∙ 2020. 2월. : 공사착공(1구간) ∙ 2020. 12월. : 공사준공(1구간) ∙ 2021. 12월. : 공사준공(2구간)
염포동 소3-203호선 소방도로 개설	L=288m B=6.0m	1,900	1,300	600	-	∙ 2019. 12월.: 공사착공 ∙ 2021. 6월. : 공사준공
대안마을 진입도로 확장	L=5.3㎞ B=6.0~8.0m	4,379	3,679	700		∙ 2018. 6월. : 공사착공 (현공정률 : 90%) ∙ 2021. 6월. : 공사준공
정자항 진입도로 개설 (중3-155호선)	L=135m B=12.0m	3,700	3,700	-		∙ 2018. 6월 : 공사착공 (현공정률 : 35%) ∙ 2019. 12월. : 공사준공
약수초교 앞(중3-415호선) 소방도로 개설	L=265m B=12.0m	1,500	1,500			∙ 2018. 5월. : 공사착공 ∙ 2019. 2월. : 공사준공

□ 문제점 및 대책

○ 사업 예산 미확보에 따른 사업 지연

□ 향후계획

○ 지속적인 사업예산 확보 및 도로개설 추진

구민건강 증진을 위한 자전거인프라 구축

□ 추진개요

○ 자전거문화센터 건립 및 자전거연습장 조성

○ 자전거도로 및 시설물 유지관리 등 정비

○ 자전거 이용 활성화를 위한 각종 시책 추진으로 이용 인구 저변 확대

□ 추진실적

○ 자전거 이용자 상해보험 가입 : ‘19. 2. 27. ~ ’20. 2. 26.

∙ 대    상 : 관내 주민등록을 두고 거주하는 모든 주민(연중)

∙ 보험내용 : 자전거사고 사망, 후유장애, 진단위로금, 벌금, 형사합의금 등

∙ 사 업 비 : 125,962천원

□ 향후계획

○ 자전거도로 정비공사 추진

∙ 내    용 : 자전거도로 및 데크 보수

∙ 사 업 비 : 50,000천원

∙ 사업기간 : ‘19. 7 ~ 11월

○ 자전거문화센터 건립 예산 확보 : ‘19. 10월 (2020년 당초예산)

∙ 위    치 : 명촌동 동천 둔치 일원

∙ 사업규모 : 자전거문화센터 건립 및 자전거 연습장 조성

∙ 사 업 비 : 1,200백만원 (60백만원 기 확보, 1,140백만원 미확보)

주민 친화적인 생태하천 조성

□ 추진방향

○ 하천 재해예방 및 피해하천 긴급복구 시행

○ 하천환경 개선으로 주민 여가선용 기회 확대

○ 사업내용                                              (단위 : 천원)

구 분	사 업 규 모	사 업 비	비 고
계		590,000
하상정비용 장비임차	관내 51개 하천	50,000
하천 시설물 정비사업	하천 시설물 정비 1식	200,000
관내 하천 풀베기공사	잡초 등 지장물 제거 1식	50,000
하천 응급복구공사	하천 응급복구 1식	50,000
동천 유지관리사업	동천 유지관리 L=13.9km	200,000	시비
태화강 억새단지 관리	억새단지 관리 A=105,070㎡	40,000	시비

□ 추진실적

○ 태화강 억새단지 및 하천 유지관리 추진 : 연중

○ 하천 시설물 응급복구공사 : 3 ~ 12월(200,000천원)

○ 무룡동 803-1번지 수해복구 : 4월 준공(28,207천원)

○ 천마산 서장사일원 석축보강공사 : 6월 착공(28,475천원)

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 12월(유지관리 : 연중)

매곡천 친수환경 조성 및 경관개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 매곡천 (매곡천 하류 ~ 마동천 합류부)

○ 사업규모 : 유지용수 공급시설 설치 L=1.0km

- 용수손실 방지시설 및 기타시설 1식

(계류시설 L=770m, B=1.0~8.0m, 팽나무 등 수목, 공원등주 등)

○ 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2020. 7월

○ 사 업 비 : 3,500백만원〔예산확보 2,150, 미확보1,350(‘20년 당초 예산 반영)〕
○ 시 공 사 : 도수종건㈜[토목], ㈜원화종건[건축], 대호전기[전기]

□ 추진실적

○ 실시설계용역 착수 : ‘17. 06. 29.

○ 실시설계용역 완료 : ‘18. 04. 30.

○ 매곡천 친수환경조성 및 경관개선사업 공사 착공 : ‘18. 07. 20.

○ 토목공사 계약해지〔문화산업개발(주)〕: ‘19. 07. 03.

○ 계약해지 후 도급사 재계약 완료〔도수종합건설(주)〕: ‘19. 08. 26.

○ 공정율 20% : ‘19. 10.

□ 문제점 및 대책

○ 주민편의시설 추가 확충 시 예산 추가 편성 요구됨

□ 향후계획

○ 준공 : ‘20. 7월

하수도 정비를 통한 친환경 도시 조성

□ 추진개요

○ 우·오수 분리 및 하수시설물 유지관리 : 3개 사업

∙ 하수관거 교체 및 개보수공사

∙ 하수관거 준설공사

∙ 하수관로 보수 및 정비사업

□ 추진실적

○ 긴급하수도 복구공사 단가계약(600,000천원) 착공 : 2월

∙공사대금 지급(2월~5월) : 금261,015,140원

○ 긴급하수도 준설공사 단가계약(500,000천원) 착공 : 2월

∙공사대금 지급(2월~8월) : 금301,969,000원

○ 하수관로 보수 및 정비사업(200,000천원)

∙관내 우수관로 보수 및 준설공사 단가계약 착공 : 2월

∙관내 우수관로 보수 및 준설공사 단가계약 준공 : 8월

∙하반기 관내 우수관로 보수 및 준설공사 단가계약 착공 : 9월

∙공사대금 지급(9월~10월) : 금55,265,200원

○ 대안마을 진입도로 오수관로 부설(627,000천원)

□ 향후계획

○ 긴급하수도 준설 및 복구공사 단가계약 완료 : 12월

○ 하수관로 보수 및 정비사업 완료 : 12월

안전하고 밝은 안심거리 조성

□ 추진방향

○ 효율적인 유지관리로 밝은 거리 조성

○ 노후 등주 및 고효율 등기구 교체로 안전사고 예방과 에너지절감

□ 추진실적

○ 통합관리시스템에 의한 유지보수

∙ 보수실적 : 가로등 640건, 보안등 770건, 터널등 9건

○ 가로․보안등 신규 설치 및 교체

∙ 관내 보안등(1회) 신규 설치 : 30등

∙ 관내 보안등(2회) 신규 설치 : 25등

∙ 무룡로 인근 고효율 가로등기구 교체공사 : 200등

∙ 가로등 자동점멸기(양방향) 교체 : 10개소

∙ 노후가로등 교체공사(염포로) : 136본(LED 150w)

□ 향후계획

○ 신속하고 정확한 가로·보안등 유지관리 : 연중

○ 노후가로등 교체공사(염포로) : 136본(LED 150w)

○ 관내 보안등(12월) 신규설치 : 40등

연암 소류지 하류 소하천 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 연암동 43번지 일원(상연암천 상류부)

○ 사업내용 : 전석쌓기  (L=400m, H=1.0~3.0m)

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 6월

□ 추진실적

○ 19년도 1회 추경 예산 신청 : ‘19. 3월

○ 20년도 당초예산 편성(심의 전) : ‘19. 9월

□ 문제점 및 대책

○ 2019년 사업비 확보 어려움(1회 추경 예산 삭감)

□ 향후계획

○ 2020년도 당초 예산 편성 시 사업 추진

Ⅳ. 2018년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과

□ 현    황

(단위 : 건)

건 명		계	완 결	추진중	불 가	비고
계		5	4	1
시정 요구	소 계	2	2
	제설함 및 자전거 거치대 정비		◯
	매곡천 일원 태풍 피해지역 보수		◯
건의 사항	소 계	3	2	1
	상습정체 구역 해소 만전		◯
	도로재포장 공사 철저		◯
	[기타 건의사항] - 자전거문화센터 건립 조속 추진 - 오토밸리로 일부 미흡한 절개지 개선 노력 - 매곡천, 천곡천 등 하천 사업시 주민건의 사항 적극 수렴 - 농소2동 호계청구 아파트 앞 우수로 지속적 관찰 - 불법 노점상에 대하여 관련 부서와 협조하여 단속 강화 - 하천 물놀이장 상설화한 자치단체 벤치마킹하여 매곡천도 물놀이장으로 상설 운영 방법 모색하기 바람			◯

□ 처리결과

구 분	시정요구․건의사항	처리내용	처리 결과
시정	① 제설함 및 자전거 거치대 비치 - 겨울철 안전사고 예방을 위하여 제설함 및 자전거 거치대(보관소)에 대한 지속적인 점검 및 정비가 필요함 ② 매곡천 일원 태풍 피해지역 보수 - 매곡천 친수환경 조성과 관련 하여 태풍 콩레이 시 피해 입은 구간에 대하여 보수조치 하고 향후 태풍피해가 발생하지 않도록 주의를 기울여 주기 바람.	∘ 겨울철 설해대비 시설물 정기 점검을 시행하여 제설함 등 제설장비 정비를 완료하였으며, 기 설치된 제설함 및 자전거 거치대는 지속적인 순찰 점검을 시행하고 미비한 부분은 발견즉시 정비 하였음. ∘ 태풍 “콩레이”로 인해 유실 된 호안공 재시공 추진중 (3개소, A=140㎡)	완료
건의	① 상습정체 구역 해소 만전 - 산업로 일원, 효문사거리 고가 차도 등 상습정체 구역에 대하여 지속적인 대책 마련이 필요하며, 연관된 도로 개통과 관련하여 지속적인 협조 체계 구축을 위하여 적극 노력하여 주기 바람.	∘ 산업로 구간의 교통체증은 산업로 확장 등 연계도로의 개설이 완료되면 완화될 것으로 판단되며, 연계도로의 조속시행 등 조기개통을 위하여 도로관리청(울산광역시 건설도로과, 종합건설본부 등)에 건의요청 하였음.	완료
	② 도로재포장 공사 철저 - 차량통행이 많은 지역, 마을 안길, 경로당 입구 지역 등 노후화된 소방도로 및 마을 안길에 대하여 면밀히 살펴보고 주민 불편사항이 발생하지 않도록 사업을 추진 하기 바람.	∘ 노후된 도로로 인한 주민불편사항이 발생하지 않도록 지속적인 순찰 점검을 시행하고, 마을안길, 차량통행이 많은 곳, 주민건의 등 필요구간은 도로정비를 시행하였음.	완료

구 분	시정요구․건의사항	처리내용	처리 결과
건의	③ 기타 건의사항 - 자전거문화센터 건립을 빠른 시일 내에 추진하여 주기 바라며, - 오토밸리로 일부 미흡한 절개지 에 대하여 개선될 수 있도록 노력 - 매곡천,천곡천 등 하천 사업 시 주민 건의사항을 적극 수렴 - 농소2동 호계청구아파트 앞 우수로 에 대하여 문제점이 없는지 지속 관찰 하기 바람 - 보행자 안전을 위협하는 불법 노점상에 대하여 관련 부서와 적극 협조 하여 지도,단속 강화 하여 주기 바람. - 하천 등을 활용 물놀이장을 상설화한 자치단체 벤치마킹하여 매곡천도 물놀이장으로 상설 운영하도록 방범을 모색하기 바람	∘ ‘20년 당초예산에 사업비를 확보하여 자전거 문화센터 건립이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기하겠음. ∘ 오토밸리로 절개지에 대해서 지속적인 순찰,점검을 시행하고, 위험구간 발생시 시 종합건설본부 정비 요청 ∘ 매곡천, 천곡천 등 주민건의사항 발생시 적극적으로 수렴 조치 ∘ 우수관로 CCTV 조사 및 우수 기전 준설작업 등 수시 점검 ∘ 농소상우회, 호계시장상인회 와 간담회 개최, 노점상 자바라 철거 및 노점상 위치 조정 보행자 안전 및 통행로 확보 ∘ 중구 동천 및 척과천 물놀이장을 벤치마킹하고 매곡천에 물놀이장 설치 방안 검토	추진중

Ⅴ. 2018. 10. 1. ~ 2019. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황 : 해당없음