도 시 과

목       차

Ⅰ.	일반현황
□	기 구 -------------------------------------------------------------	19 - 1
□	정ㆍ현 원 -------------------------------------------------------------	19 - 1
□	분장사무 현황 -----------------------------------------------------	19 - 1
Ⅱ.	예산편성 및 집행현황 ---------------------------------------------	19 - 2
Ⅲ.	2024년도 주요업무계획 및 실적
□	개발제한구역 관리 및 주민지원사업 발굴 ---------------	19 - 3
□	명품북구 실현을 위한 도시관리계획 운영 ---------------	19 - 4
□	주민 중심의 도시개발사업 추진 ----------------------------	19 - 5
□	토지구획정리사업장 긴급복구지원 사업 ------------------	19 - 6
□	매력있는 도시조성을 위한 체계적인 경관관리 ---------	19 - 7
□	공공디자인 진흥계획 수립 ------------------------------------	19 - 8
□	국가산단(효문공단) 활력있고 아름다운 거리 조성 ----	19 - 9
□	이화정 쉼터 조성사업 ------------------------------------------	19 - 10
□	상안교 사거리 일원 주민 휴식공간 조성 ----------------	19 - 11
□	농소1동 도시재생사업 추진 ----------------------------------	19 - 12
□	소규모주택정비 관리지역 내 기반시설 조성 ------------	19 - 13
□	지역특성 살리기(로컬디자인) 사업 -------------------------	19 - 14
□	만남의 광장 조성사업 ------------------------------------------	19 - 15
□	강동동 도시재생 공모사업 추진 ----------------------------	19 - 16
Ⅳ.	2023년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 --------	19 - 17
Ⅴ.	2023. 10. 1.~2024. 9. 30. 구정질문에 대한 추진상황 ------------	19 - 18

Ⅰ. 일반현황

□ 기  구

						도 시 과
도시행정팀						도시계획팀					도시개발팀					도시재생팀			전략사업팀

□ 정ㆍ현원

(단위 : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	21	1	5	9	5	1
현 원	21	1	6	9	4	1

□ 분장사무 현황

팀 별	분 장 사 무
도시행정	◦ 개발제한구역 관리계획 수립 ◦ 개발제한구역 내 주민지원사업 및 생활비용 보조사업 관리 ◦ 개발제한구역 내 행위허가신고 및 불법행위 단속
도시계획	◦ 도시기본계획 관련 업무 ◦ 도시관리계획(도시계획시설, 지구단위계획, 장기미집행) 관련 업무 ◦ 북구성장관리방안 수립
도시개발	◦ 도시개발사업 및 택지개발촉진법에 의한 업무 ◦ 토지구획정리사업 및 산업단지에 관한 업무 ◦ 공공주택지 조성사업에 관한 업무
도시재생	◦ 도시재생 사업추진 및 시행, 후속지원 및 시설관리업무 ◦ 사업 발굴 및 활성화계획 수립/변경/관리에 관한 업무 ◦ 도시재생관련 주민공동체 역량강화에 관한 업무 ◦ 도시 및 주거환경 정비에 관한 업무
전략사업	◦ 북구 전략거점지역 개발에 관한 업무 ◦ 울산 북구 폐선부지 활용사업 기반조성 업무 ◦ 도시경관, 공공디자인, 셉테드(조례, 기본계획, 위원회) 관련 업무

도시과 19 -

Ⅱ. 예산편성 및 집행현황

【일반회계】                                                      (단위 : 천원)

정책사업ㆍ단위사업						예산액	주요 편성내용	주요집행내용	잔액
총 계						3,433,772			3,056,957
		정책사업				3,080,138			2,839,847
		재무활동				92,372			92,372
		행정운영경비				261,262			124,738
국토 및 지역개발						3,172,510			2,839,847
		지역 및 도시				3,172,510
			쾌적한 도시환경 조성			226,744			146,407
				체계적인 도시계획 및 개발		226,744	∙개발제한구역 관리 및 주민지원사업(생활비용보조사업) ∙도시계획위원회 운영 ∙도시계획 지형도면 작성 용역 등 ∙토지구획정리사업장 긴급복구 지원	∙개발제한구역 관리 ∙위원회 참석수당 등 ∙도시관리계획 결정 용역비 ∙도시개발사업장 긴급복구	146,407
			도시재생 및 경관			2,549,400			2,393,567
				도시재생		1,187,870	∙정자마을 도시재생활성화계획 수립 용역 ∙농소1동 도시재생사업 ∙천걸음 이화정 도시재생사업	∙활성화계획 수립 용역비 ∙도시재생 시설 유지관리 ∙도시재생 기초지원센터 운영	1,036,215
				도시경관 구축		1,361,530	∙경관 및 공공디자인 진흥위원회 운영 ∙지역특성 살리기 사업 ∙색채마을 테마파크 시범사업	∙위원회 심의수당	1,357,352
			주민 정주여건 개선			303,994			299,873
					전략사업	303,994	∙상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사	∙상안교 사거리 일원 주민휴식공간 부지정지공사	299,873
	재무활동					92,372			92,372
			보전지출			92,372	∙국시비보조금 반환금		92,372
기타						261,262			124,738
		기타				261,262			124,738
			행정운영경비			261,262			124,738
				인력운영비		187,777	∙직원 시간외 수당 ∙기타직(임기제) 보수	∙직원 시간외 수당 ∙기타직(임기제) 보수	89,270
				기본경비		73,485	∙사무관리비, 국내여비 ∙업무추진비, 직무수행경비	∙사무관리비, 국내여비 ∙업무추진비, 직무수행경비	35,468

Ⅲ. 2024년도 주요업무계획 및 실적

개발제한구역의 관리 및 주민지원사업 발굴

□ 개발제한구역 현황

G·B 면적	감시원	경계표석	안내판
76.14㎢	1명	825개	75개

□ 추진방향

○ 개발제한구역 불법행위 단속 및 관리계획 수립 추진

○ 개발제한구역 주민지원사업(생활편익 및 환경·문화공모사업) 적극 추진

○ 불법행위 사전예방을 위한 순찰·시설정비 및 주민홍보 실시

○ 개발제한구역내 인·허가 시 신속한 처리로 주민 편익 증진

□ 추진실적

○ ‘24년 개발제한구역 단속 및 관리계획 수립 : '24. 1.

○ ‘25년 개발제한구역 주민지원사업 선정 : 2건(국비 1,715백만원 확보)

○ ‘24년 개발제한구역 행위허가 및 신고 처리 : 허가 169건, 신고 27건

○ ‘24년 개발제한구역 불법행위 점검·단속 실시 : 27건

○ ‘24년 개발제한구역 홍보물 제작‧배부 : '24. 6.(부채 1,500개)

□ 향후계획

○ ‘24년 개발제한구역 내 현수막 및 경계표석 시설물 일제정비 : 12건

○ ‘24년 개발제한구역 생활비용보조사업비 지급 : 12월(4세대 4,000천원)

○ 지속적인 개발제한구역 불법행위 단속 실시

○ 개발제한구역 행위허가 처리 및 제한에 대한 주민홍보 지속 실시

명품북구 실현을 위한 도시관리계획 운영

□ 추진방향

○ 체계적인 도시관리계획 결정 및 변경을 위한 용역 추진

○ 장기미집행 도시계획시설 해제 신청에 따른 관리방안 수립

○ 도시관리계획 결정 및 변경을 위한 도시계획위원회 운영

□ 추진실적

○ 장기미집행 도시계획시설(결정)변경 조서 및 지형도면 작성 용역시행    : '24.  1.

○ 제1회 도시건축공동위원회 개최                                       : ‘24.  3.

○ 도시관리계획(원지1지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시          : '24.  3.

○ 도시관리계획(연암지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시           : '24.  3.

○ 제1회 도시계획분과위원회 개최 (서면심의)                             : ‘24.  8.

○ 제1회 도시계획위원회 개최                                           : ‘24.  9.

○ 도시관리계획(청소년수련시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시              : '24.  9.

○ 도시관리계획(도로: 소3-293호선) 결정 및 지형도면 고시                 : '24. 10.

○ ’24년 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 공고                : '24. 10.

○ 장기미집행 도시계획시설 해제 검토 건수                              : 4건

○ 도시관리계획 결정(변경) 입안 제안 검토 건수                          : 3건

□ 향후계획

○ 장기미집행 도시계획시설 해제 입안 검토 및 결정

○ 불합리한 도시계획시설 재검토 및 시책사업에 따른 도시관리계획 결정 추진

○ 장기미집행 도시계획시설(결정)변경 조서 및 지형도면 작성 용역 완료

주민 중심의 도시개발사업 추진

□ 추진방향

○ 도시개발사업의 원활한 사업추진 및 절차 이행이 될 수 있도록 관리

□ 추진실적

(단위 : 천㎡, 명, 백만원)

구분	지구명	사업규모	사업기간	사업비	추진사항 및 향후계획
합계	11개소	∙면 적: 4,178 ∙수용인구: 74,621		1,069,308
구 획 정 리 (2)	소계	∙면 적: 1,610 ∙수용인구: 27,923		165,090
	진장‧명촌 (87%)	∙면 적: 1,438 ∙수용인구: 24,695	‘98. 8. 14. ~ ’20. 8. 13.	149,800	∙시공사 부도 및 사업비 부족으로 사업 추진 불투명 ∙조합 파산선고 : ‘19. 1. 30. ∙사업비 관련 소송 승소 시 잔여공정 추진
	호수 (85%)	∙면 적: 172 ∙수용인구: 3,228	‘93. 2. 11. ~ ’15. 12. 31.	15,290	∙시공사 부도 및 사업비 부족으로 사업 추진 불투명 ∙조합의 자구책 마련 필요
도 시 개 발 (6)	소계	∙면 적: 2,130 ∙수용인구: 36,654		663,499
	천곡 (미착공)	∙면 적: 363 ∙수용인구: 6,305	‘22. 4. 7. ~ ’28. 12. 31.	135,000	∙구역지정 및 계획수립 : ‘21. 1. 21. ∙환지계획인가 : ’23. 6. 22. ∙개발계획변경 : ‘24. 5. 30.
	천곡스마트시티 (미착공)	∙면 적: 745 ∙수용인구: 9,329	인가일로부터 3년간	169,083	∙지정제안 수용 : ‘21. 5. 27. ∙구역지정 요청 : ’23. 6. 30.
	강동산하2 (미착공)	∙면 적: 221 ∙수용인구: 3,687	인가일로부터 4년간	87,378	∙지정제안 수용 : ‘22. 2 . 4. ∙구역지정 및 계획수립 : ‘24. 6. 13.
	약수 (미착공)	∙면 적: 491 ∙수용인구: 8,077	인가일로부터 4년간	147,682	∙지정제안 수용 : ‘22.. 11. 25. ∙구역지정 요청 : ’24. 7. 12.
	달천 (미착공)	∙면 적: 174 ∙수용인구: 5,444	인가일로부터 3년간	58,156	∙지정제안 수용 : ‘22. 12. 27. ∙구역지정 요청 : ‘23. 12. 21.
	무룡 (미착공)	∙면 적: 136 ∙수용인구: 3,812	인가일로부터 4년간	66,200	∙지정제안 신청 : ‘24. 3. 29.
공 공 주 택 지 (3)	소계	∙면 적: 438 ∙수용인구: 10,044		240,719
	율동공공주택지 조성(100%)	∙면 적: 219 ∙수용인구: 6,393	‘11. 1. 20. ~ ’24. 12. 31.	131,753	∙부분준공 공고 : ‘21. 12. 23. ∙지구계획 변경 : ‘22. 12. 30. ∙구역외 관형철탑공사 착공 예정: ’24 10.
	상안 행복주택 공공주택지구	∙면 적: 10 ∙수용인구: 196	‘20. 1. 7. ~ ’26. 12. 31.	22,640	∙지구계획 승인 : ’22. 3. 10. ∙지구계획 변경 : ‘24. 7. 8. ∙착공 예정 : ’24. 12.
	농소 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구	∙면 적: 209 ∙수용인구: 3,455	‘21. ~ ’25.	86,326	∙지구지정 고시 : ‘22. 6. 3. ∙지구계획 승인신청 예정 : ‘25. 1. ~

□ 향후계획

○ 주기적인 사업장 관리로 사업의 정상추진 및 민원발생 최소화

토지구획정리사업장 긴급복구 지원

□ 추진방향

○ 주기적인 도로 안전시설물 점검 및 긴급복구를 통한 주민 불편사항 해소

○ 노후·파손된 도로 복구로 보행자 및 운전자 안전 사고 예방

○ 우수시설 정비공사 추진으로 쾌적한 주거환경 조성 및 재난 상황 대비

※ 소요예산 : 100,000천원(구비)

□ 추진실적

○ 긴급복구지원 단가계약 착공 : '24. 2.

○ 긴급복구지원 단가계약 건설폐기물 처리용역 착수 : '24. 3.

○ 긴급복구지원 단가계약 1차 작업지시 : '24. 3.

※ 강변효성해링턴 아파트 일원 외 4개소(도로 및 보도 재정비, 휀스 교체 등)
○ 긴급복구지원 단가계약 2차 작업지시 : '24. 5.

※ 당수교 일원 외 7개소(도로 및 보도 재정비, 측구 포장, 가드레일 단부 설치 등)

○ 긴급복구지원 단가계약 기성 : '24. 6.

○ 긴급복구지원 단가계약 3차 작업지시 : '24. 9.

※ 명촌11길 일원 외 5개소(도로 재정비, 우수받이 설치 및 보수, 포트홀 복구 등)

□ 향후계획

○ 토지구획정리사업장 긴급복구지원 사업 준공 : ‘24. 12.

매력있는 도시조성을 위한 체계적인 경관관리

□ 추진방향

○ 경관위원회 및 공공디자인 진흥위원회 운영 강화

○ 지역현황 문제를 파악하고 해결방안 제시

□ 추진실적

○ 경관위원회 및 공공디자인 진흥위원회 운영 강화

∙ 경관위원회 운영 : 심의 및 자문 등 28건

○ 공공디자인 진흥을 위한 공공조형물 및 공공시설물 관리

∙ 공공조형물 정기점검 : 1회

○ 체계적 경관 조성 및 관리를 위한 시스템 구축

∙ 경관 조성을 위한 각종 국비지원 공모사업 응모

○ 지역의 경관 개선을 위한 사업의 다각화 추진

∙ 지역 특색을 반영한 경관개선 사업추진

□ 향후계획

○ 공공디자인 진흥위원회 개최 : '24. 11.

공공디자인 진흥계획 수립

□ 추진개요

○ 용역범위 : 북구 관내 전역(157.36㎢)

○ 용역기간 : ‘23. 1. ~ ’24. 12.

○ 용 역 비 : 106,000천원

○ 용역내용

∙ 현황조사 및 분석

∙ 관련 법령, 계획 및 사례 검토

∙ 공공디자인 진흥의 기본목표 및 전략 수립

∙ 공공시설물 가이드라인 및 운영 매뉴얼 수립

∙ 시범사업 및 실행계획 수립

∙ 공공디자인 진흥계획의 구축 및 운영을 위해 필요한 사항 등

※ 「공공디자인법」제6조 및 「울산광역시 북구 공공디자인 진흥 조례」제5조 : 5년마다 수립

□ 추진실적

○ 용역착수 : ’23. 3.

○ 현황조사 및 분석 : ‘23. 5.

○ 관계부서 및 주민 설문조사 : ‘23. 6.

○ 중간보고 : ‘23. 11.

○ 공청회 개최 : ‘24. 2.

□ 향후계획

○ 공공디자인 진흥위원회 심의 : ‘24. 11.

○ 최종보고 : ‘24. 12.

계 속 사 업

국가산단(효문공단) 활력있고 아름다운 거리 조성

□ 추진방향

○ 위    치 : 효문동 819번지 일원(효문공단 산성로, 연암천 일원)

○ 사업규모 : 국가산단 가로 및 도로환경 개선(L=1.0㎞)

○ 사업기간 : ‘22. 7. ~ ’24. 8.

○ 사 업 비 : 1,960,000천원(국 960,000 시 500,000 구 500,000)
※ 설계 140,000, 공사 1,814,000, 기타 6,000

○ 사업내용

∙ 산성로 가로경관 정비

∙ 연암천 친수공간 및 문화향유공간(쉼터) 조성

∙ 보안등 및 CCTV 설치 등

□ 추진실적

○ 공모선정 및 업무협약 : ’22. 6.

○ 기본 및 실시설계 완료 : ’23. 8.

○ 연암천 산책로 데크설치(1구간) 준공 : ’23. 10.

○ 연암천 쉼터 및 산책로(2구간) 준공 : ’24. 5.

○ CCTV 설치 : ’24. 5.

○ 옹벽 개선 및 관문경관 설치 공사 준공 : ’24. 7.

○ 효문공단 도로정비 공사(효문동 931-6번지 외 2개소) 준공 : ’24. 8.

□ 향후계획

○ 사업 완료 결과보고서 제출(한국산업단지공단) : ‘24. 10.

계 속 사 업

이화정 쉼터 조성사업

□ 추진방향

○ 위    치 : 북구 중산동 680-3번지 일원(이화마을 일원)

○ 사업규모 : A=191㎡

○ 사업기간 : ‘23. 4. ~ ’24. 8.

○ 사 업 비 : 200,000천원
※ 보상 75,000, 설계 10,000, 공사 115,000

○ 사업내용 : 주민쉼터 및 어울마당 조성

□ 추진실적

○ 공유재산 심의 : ’23. 3.

○ 보상계획 열람 : ’23. 5.

○ 현장 감정평가 : ’23. 6.

○ 협의보상(1차) 완료 : ’23. 8.

○ 협의보상(2차) 완료 : ’24. 2.

○ 실시설계용역 완료 : ’24. 5.

○ 공사준공 : ’24. 8.

○ 시설물 이관(공원녹지과) : ’24. 9.

계 속 사 업

상안교 사거리 일원 주민 휴식공간 조성

□ 추진개요

○ 위    치 : 북구 호계동 774-2번지 일원

○ 사업규모 : A=700㎡

○ 사업기간 : ‘23. 4. ~ ’24. 8.

○ 사 업 비 : 600,000천원
※ 보상 577,000, 공사 23,000

○ 사업내용 : 주민쉼터 및 어울마당 조성

□ 추진실적

○ 공유재산 심의 : ’23. 3.

○ 협의보상(사유지) 완료 : ’23. 8.

○ 국유재산(국가철도공단) 매수 신청 : ’23. 11.

※ 2필지 추가 매입 요청

○ 국유재산(한국자산관리공사) 매수 : ’23. 12.

○ 국유재산(국가철도공단) 매수 신청 : ’23. 12.

○ 공유재산 심의 : ’24. 3.

○ 추경(1차)예산 편성 : ’24. 5.

○ 국유재산(국가철도공단) 매수 촉구 : ’24. 9.

□ 향후계획

○ 국유재산(국가철도공단) 매수 : ’24. 12.

○ 사업추진(지역경제 활성화 시책사업) : ’25. 3.

신 규 시 책

농소1동 도시재생사업 추진

□ 추진개요

○ 위    치 : 호계역 831-2번지 일원(舊호계역 및 호계시장 일원)

○ 사업규모 : A=227,391㎡

○ 사업기간 : ‘24년 ~ ‘27년(4년간)

○ 사 업 비 : 33,372,000천원(국 16,686,000 시 11,680,000 구 5,006,000)

※ 2024년 교부액 : 국 450,000 시 315,000

○ 사업내용 : 철도 유휴부지로 인한 지역여건변화를 적극수용한 여가문화콘텐츠 전략으로 새로운 문화가치 창출 및 지역경제 활성화

□ 추진실적

○ 농소1동 도시재생사업 시 도시재생위원회 심의     : ’24. 2.

○ 농소1동 도시재생활성화계획 고시                 : ’24. 2.

○ 아트전시관 조성사업 공공건축 사업계획 사전검토  : ’24. 5.

○ 아트전시관 건축위원회 심의                      : ‘24. 7.

○ 호계역 구조보강 실시설계 용역 착수              : ‘24. 8.

○ 수동공원 정비사업 실시설계 용역 착수            : ’24. 8.

□ 향후계획

○ 수동공원 정비사업 공사 착공 : ‘24. 11.

○ 아트전시관 설계공모 시행    : ’24. 11. ~ ‘25. 2.

신 규 시 책

소규모주택정비 관리지역 내 기반시설 조성

□ 추진개요

○ 위    치 : 염포동 521-1번지 일원(북구A-02 주거환경개선사업구역)

○ 규    모 : 75,535㎡

○ 사업기간 : ‘24년 ~ ’26년(3년간)

○ 사 업 비 : 15,000,000천원(국 7,500,000 시 4,500,000 구 3,000,000)

○ 사업내용 : 소규모주택정비 관리지역 지정에 따른 기반시설(도로,

주차장 등) 조성

□ 추진실적

○ 관리계획 관련 주청 주재 주민간담회             : ‘23. 11.

○ 소규모주택정비 관리계획 사전컨설팅            : ‘23. 12.

○ 소규모주택정비 관리계획(안) 주민 열람 공고     : ‘24. 8.

○ 소규모주택정비 관리계획(안) 관련부서 협의 요청 : ’24. 8.

□ 향후계획

○ 소규모주택정비 관리지역 지정 신청 : ‘24. 11.

○ 도시계획위원회 심의               : ‘24. 12.

신 규 시 책

지역특성 살리기(로컬디자인) 사업

□ 추진개요

○ 위    치 : 울산숲 9.5㎞ 일원(호계철길 건널목사무소 등)

○ 사업기간 : ‘23. 10. ~ ’25. 12.

○ 사 업 비 : 900,000천원(특 450,000, 구 450,000)

※ 설계 20,000, 공사 570,000, 프로그램 110,000, 위탁사업비 200,000

○ 사업내용

∙ 지역특화 디자인(울산숲 BI) 발굴 및 표준디자인, 가이드라인 등

∙ 지역특화 디자인 기반 공공시설물(벤치, 이정표, 버스정류장 등) 제작 및 설치

∙ 호계철길 건널목 일원 거점공간 조성, 프로그램 사업 등

□ 추진실적

○ 공모사업 계획 수립 및 신청 : ’23. 6.

○ 공모선정 및 사업비(특별교부세) 교부 : ’23. 10.

○ 울산 디자인주도 제조혁신센터 협약 : ’24. 4.

○ 착수보고회 개최 : ’24. 5.

○ 중간보고회 개최 : ’24. 9.

□ 향후계획

○ 울산숲 BI 개발 및 표준디자인, 가이드라인 수립 : ’24. 12.

○ 울산숲 구간 공공시설물 제작 및 설치 : ’25. 5.

○ 호계철길 건널목 일원 거점공간 조성 : ’25. 9.

신 규 시 책

만남의 광장 조성사업

□ 추진방향

○ 위    치 : 신천동 374-10번지(매곡천~동천 합류부) 일원

○ 사업기간 : ‘23. 1. ~ ’25. 3.

○ 사 업 비 : 1,380,000천원(구 750,000, 기 630,000)

※ 보상 485,000 설계 50,000, 공사 845,000

○ 사업내용

∙ 울산숲 연결 보행로 설치

∙ 광장 및 주민 휴식공간 조성(부지정지, 조형물 설치)

□ 추진실적

○ 발전소 주변지역 지원사업 신청 : ’23. 3.

○ 협의보상 완료 : ’23. 5.

○ 보행로 연결공사 실시설계용역 완료 : ’23. 8.

○ 발전소 주변지역 지원사업 선정 : ’23. 9.

○ 보행로 연결공사 준공 : ’24. 2.

○ 만남의 광장 조성공사 실시설계용역 완료 : ’24. 7.

○ 조형물 제작‧설치 협상에 의한 계약 요청 : ’24. 9.

□ 향후계획

○ 조형물 설치 및 공사 추진 : ’24. 11.

○ 공사준공 : ’25. 3.

현 안 사 업

강동동 도시재생 공모사업 추진

□ 추진방향

○ 위    치 : 정자동 669번지 일원

○ 사업규모 : A=93,000㎡(뉴빌리지사업)

○ 사업기간 : ‘25년 ~ ’29년(4년간)

○ 사 업 비 : 30,000,000천원(국 15,000,000 시 10,500,000 구 4,500,000)

○ 사업내용 : 정자항 배후 저층주거지 주거환경개선을 위하여 수요대응형 주택공급을 유도할 수 있는 주택정비사업 활성화 및 기반‧편의시설 공급

□ 추진계획

○ 강동동 도시재생활성화계획 수립 용역          : ‘24. 5. ~ ’25. 12.

○ 강동동 뉴빌리지사업계획(안) 착수보고회       : ‘24. 6.

○ 현장조사 및 주민의견수렴(설문조사, 대표회의)  : ‘24. 7.

○ 의회의견청취 및 사전컨설팅                   : ‘24. 8.

○ 주민공청회                                     : ‘24. 9.

○ 강동동 뉴빌리지사업 공모신청                  : ‘24. 10.

□ 향후계획

○ 공모 중앙평가(서면평가, 현장실사, 중앙평가)   : ’24. 10. ~ 11.

○ 공모 결과발표                                : ’24. 12.

Ⅳ. 2023년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과

□ 부서총괄

(단위  : 건)

건 명		계	완 결	추진중	불 가	비 고
계		2	1	1
건의 사항	소 계	2	1	1
	도시재생사업 준공 이후 후속 관리 철저		O
	미준공 토지구획정리사업장 긴급복구 적극추진			O

□ 처리결과

구 분	시정요구·건의사항	처 리 내 용	처리 결과
건의 사항	① 도시재생사업 준공 이후 후속 관리 철저 - 도시재생사업 완료 이후, 발굴된 자원을 활용한 지역의 도시재생이 연속적으로 이루어져야 함에도 사업이 끝나면 후속 관리가 제대로 되지 않고 있음. 양정동 자동차테마거리 내 민간 시설물에 대한 유지, 보수가 자율로 이루어져 일부는 도시미관을 저해하는 등 사업의 지속적인 효과에 부정적인 영향이 있고, 이 외 대부분의 도시재생사업지가 완료 후 후속 관리가 제대로 이루어지지 않고 있으므로 이에 대한 체계적인 관리가 요구되므로 대책 강구 바람.	∘ 「울산광역시 북구 도시재생 사후관리 조례안」 제정에 따라 도시재생사업 종료 후에도 도시재생사업의 효과가 지속‧확산될 수 있도록 사후관리계획 수립 및 점검, 모니터링을 통해 체계적으로 관리중에 있으며, ∘ 향후 연계가능한 중앙부처 공모사업 발굴 등 사업효과의 지속성을 확보하기 위한 노력을 하겠음	완결
	② 미준공 토지구획정리사업장 긴급복구 적극 추진 - 미준공 토지구획정리사업장에 대하여 인도 블록 정비, 빗물받이 보수 등 구민 생활에 밀접하고 시급한 부분에 최소한의 범위에서 지원하고 있지만 예산 조기 소진에 따라 수요를 충족할 수 없음. 미준공 지역이라도 구민의 안전과 불편 해소를 위한 긴급복구에 대해서는 긍정적으로 검토, 추진 바람.	◦2019년부터 긴급도로복구공사 단가계약을 통해 공공시설물 점검 및 긴급복구 추진하고 있음.	추진중

Ⅴ. 2023. 10. 1. ~ 2024. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황

: 해당없음