2013년도 공유재산관리계획 변경계획안

의 안 번 호	295		제출일자 : 2013. 11. 12. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 제안이유

❍ 2013년도 공유재산 관리계획에 대하여 「공유재산 및 물품관리법」 제10조 제1항 및 「울산광역시 북구 공유재산 관리조례」제11조 제1항에 의거

❍ 「세대공감창의놀이터 건립」계획 변경에 따라 공유재산의 취득에 관한 변경계획을 수립하여 울산광역시 북구 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 제안근거

❍「공유재산 및 물품관리법」제10조(공유재산의 관리계획)

❍「공유재산 및 물품관리법 시행령」제7조(공유재산의 관리계획)

❍「울산광역시 북구 공유재산 관리 조례」제11조(공유재산 관리계획)

3. 주요골자

❍ 「세대공감창의놀이터 건립」계획 변경내용

구 분	면 적(㎡)			취득가격(백만원)
	당 초	변경 후	증 감	당 초	변경 후	증 감
건 물 신 축	1,500	1,240	감 260(-17%) 지하 1층, 지상 3층 ⇒ 지하 1층, 지상 2층	2,862	4,192	증 1,330(46%)

□ 변경사유 : 실내·외 체험시설 조성에 따른 건축비 증액

4. 관리계획 사업별 내역

□ 세대공감창의놀이터 건립

□ 주관부서 : 총무국 주민참여과

□ 취득대상 재산현황

◦ 위    치 : 울산광역시 북구 중산동 829번지(구.음식물자원화시설)

◦ 취득재산

- 건물신축 : 1동(지하 1층, 지상 2층), 건축연면적 1,240㎡

* 당초 : 지하1층 ~ 지상 3층 / 연면적 1,500㎡

◦ 용도지역 : 생산녹지지역, 농업진흥구역

◦ 추정가격 : 4,192백만원(구비)

□ 취득 변경사유

◦ 그물놀이터, 나무놀이터 등 내부 체험시설과 특색에 맞는 인테 리어 시행 등으로 당초 대비 사업비가 30% 이상 증액됨.

□ 취득방법 : 건물 신축

□ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2014. 11월

5. 의결사항 : 공유재산관리계획(변경)의 적정여부 심의 의결

6. 공유재산관리계획(변경)서 및 재산현황(위치도) : 별첨

공유재산 관리계획 변경서

□ 2013년도 관리계획 총괄표

○ 회계명 : 일반회계

(단위 : ㎡, 천원)

구 분			당 초			변 경			합 계			비고
			건수	수량	금액	건수	수량	금액	건수	수량	금액
취득	계	토지 건물 기타	2 4 1	11,395 4,220 5,344	3,292,700 7,468,000 507,300	1	△260	1,330,000	2 4 1	11,395 3,960 5,344	3,292,700 8,798,000 507,300
	1. 매 입	토지 건물 기타	2	11,395	3,292,700				2	11,395	3,292,700
	2. 교환으로 취 득	토지 건물 기타
	3. 기타취득	토지 건물 기타	4 1	4,220 5,344	7,468,000 507,300	1	△260	1,330,000	4 1	3,960 5,344	8,798,000 507,300	신·증축 공사
처분	계	토지 건물 기타
	4. 매 각	토지 건물 기타
	5. 양 여	토지 건물 기타
	6. 교환으로 처 분	토지 건물 기타
	7. 기타처분	토지 건물 기타

취득대상 재산목록

○ 회계명 : 일반회계

(단위 : ㎡, 천원)

일련 번호	구분	재 산 의 표 시			추정가액	취득 시기	취 득 사 유	비고
		지목 (구조)	소재지	수량
1	건물	철 근 콘크리트조	울산광역시 북구 중산동 829번지	1,240	4,192,000	2014	세대공감 창의놀이터 건립

재   산   현   황

명칭	세대공감창의놀이터 건립
재산 현황	∙ 위 치: 울산광역시 북구 중산동 829번지 ∙ 건축규모: 지하 1층, 지상 2층(연면적 1,240㎡) ※ 주요시설: 어린이놀이터, 마을공방, 동네사랑방, 구판장 등 ∙ 용도지역: 생산녹지지역, 농업진흥구역 ∙ 추정가격: 4,192백만원
위치도
조감도

현  장  사  진

명칭	세대공감창의놀이터 건립
현장사진 ①
현장사진 ②