	발간등록번호
	57-3720000-000097-10
	2021년 울산광역시 북구의회 행정사무감사
2021년 행정사무 처리상황 보고
			울산광역시 북구

건 설 과

목      차

Ⅰ.	일반현황
□	기 구 ---------------------------------------------------------------	20 - 1
□	정ㆍ현 원 ------------------------------------------------------------	20 - 1
□	분장사무 현황 ----------------------------------------------------	20 - 1
Ⅱ.	예산편성 및 집행현황 --------------------------------------	20 - 2
Ⅲ.	2021년도 주요업무계획 및 실적
□	체계적인 건설행정 추진 ----------------------------------------	20 - 4
□	도로편입 미지급용지 보상으로 민원 해소 ------------------------	20 - 5
□	이용자 중심의 도로환경 조성 ---------------------------------------	20 - 6
□	설해대비체계 확립으로 선제적 재난 대응 ----------------	20 - 7
□	소방도로 개설로 안전한 주거환경 조성 -------------------	20 - 8
□	구민건강 증진을 위한 자전거인프라 구축 ----------------	20 - 9
□	주민을 위한 안전하고 쾌적한 하천공간 조성 -----------	20 - 10
□	운곡천 지방하천 정비사업 ------------------------------------	20 - 11
□	구민 중심의 하수도 인프라 조성 ---------------------------	20 - 12
□	안전하고 밝은 거리환경 조성 -------------------------------	20 - 14
□	송정지구 외부관로 및 상부도로 개설사업 ---------------	20 - 15
□	어물동 복골마을 진입도로 확장 ----------------------------	20 - 16
Ⅳ.	2020년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 --------	20 - 17
Ⅴ.	2020. 10. 1. ~ 2021. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황 -----	20 - 18

Ⅰ. 일반현황

□ 기  구

						건 설 과
건설행정담당			토목담당				치수담당				하수담당			기전담당

□ 정·현원                                           (단위  : 명)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	6	7	9	3
현 원	25	1	6	4	7	7

□ 분장사무 현황

담 당 별	분 장 사 무
건설행정	◦ 국ㆍ공유재산관리 및 용도폐지 ◦ 토지 및 지장물 보상 ◦ 도로 점ㆍ사용, 노점상 관리 및 단속 등
토 목	◦ 도로건설사업 종합계획수립 및 시행 ◦ 도로건설 및 유지ㆍ보수, 설해대책계획수립 및 시행 ◦ 자전거 이용시설 설치계획 수립 및 시행 등 ◦ 지하안전관리특별법 관련 지하시설물 관리
치 수	◦ 하천 정비 기본계획수립 및 시행 ◦ 하천ㆍ소하천 정비공사 및 유지관리 ◦ 하천, 공유수면 점사용허가 및 단속 등
하 수	◦ 하수도 정비 기본계획수립 및 시행 ◦ 개인하수처리시설 및 하수도 시설물 유지관리 ◦ 하수원인자부담금 부과징수 업무
기 전	◦ 가로, 보안등 관리 ◦ 배수장 및 하수중계펌프장 유지관리 ◦ 지하수 이용개발 신규확인 및 폐공업무 전반 ◦ 건설기계 및 전문건설업 관련 업무

건설과 20 -

Ⅱ. 예산편성 및 집행현황

【일반회계】                                                     (단위 : 천원)

정책사업ㆍ단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
총 계				14,607,138			7,779,230
	정책사업비			14,209,345			7,561,899
	재무활동			148,343			119,245
	행정운영비			249,150			98,086
		하수도 정비		383,324			190346
			하수도 정비	243,324	∙오폐수 관리 ∙하수도 긴급보수 및 준설 ∙하수도 준설 ∙하수중계펌프장 공공요금 및 유지관리비	∙분뇨수집운반 업체 지원 ∙하수도 긴급보수 및 준설 ∙소규모 하수도 구조개선사업 ∙하수중계펌프장 공공요금 및 유지관리비	107,499
			하수관로 보수 및 정비공사	140,000	∙하수관로 보수 및 정비	∙우수관로 보수 및 준설공사 단가계약	82,847
		도로의 개설 및 유지관리		9,815,008			4,842,598
			도로개설	5,156,000	∙자전거이용활성화 사업 ∙장기미집행도시계획시설 (도로)토지ㆍ건물 보상금 및 철거비 ∙소방도로개설	∙자전거이용자 상해보험 보험료 ∙장기미집행도시계획시설 토지 및 지장물 보상금 ∙소방도로 개설 보상 및 공사비	3,418,439
			도로 및 도로시설물 유지관리	2,048,548	∙도로정비 및 도로시설물 긴급복구 ∙보도 잡초관리 ∙동별 주민참여예산 소규모사업 ∙설해대비 도로유지관리 ∙과적차량 단속	∙불량도로 정비 및 긴급 도로복구, 도로변 풀베기 단가계약 공사비 ∙도로 안전시설물 유지 관리비 ∙제설창고 공공요금 및 유지비, 자재 구입비 ∙과적차량 공공요금 및 유지비	944,460
			가로·보안등 관리	2,610,460	∙공공요금, 유지관리비 ∙보안등 설치, ∙노후가로등 교체 ∙가로등 점멸기 교체	∙가로보안등 전기요금 ∙가로보안등 유지보수 ∙보안등 설치 ∙노후가로등 교체 ∙가로등 점멸기 교체	479,699

정책사업ㆍ단위사업				예 산 액	주요편성내용	주요집행내역	잔 액
		하천정비		3,641,135			2,383,966
			하천관리	1,155,673	∙하천시설 관리 및 하상정비 ∙태화강 유지보수사업 ∙억새단지 관리 ∙지방하천 유지관리사업 ∙동천 암벽 분수 조성	∙하천둔치관리 기간제 인건비 ∙공공요금 및 유지관리비 ∙억새단지 관리 인건비 ∙하천 제방 정밀점검용역비 ∙지방하천 유지관리사업	548,601
			하천정비공사	2,147,800	∙하천복구공사 ∙하천정비사업	∙하천 응급복구공사 ∙매곡천 주민편의시설확충 ∙운곡천지방하천 정비사업	1,774,935
			효율적인 배수장 관리	167,662	∙배수장 시설장비 유지비	∙배수장 공공요금	52,573
			경관조명 개선사업	170,000	∙매곡천,인도교, 화봉5교 인도교 경관조명 설치공사	∙매곡천,인도교, 화봉5교 인도교 경관조명 설치공사	7,857
		건설행정지원체제강화		370,178			144,989
			건설도시 업무추진	370,178	∙지적측량수수료,공공요금 ∙노점상 노상적치물 정비 ∙미지급용지 보상금	∙노점상 노상적치물 정비 ∙지적측량 수수료, 공공요금(우편) ∙미지급용지 보상금	144,989
		재무활동		148,343	∙국시비 보조금 반환금		119,245
			보전지출	148,343	∙태화강유지보수사업 집행 잔액 이자 ∙‘19년 노후 가로등 교체공사 보조금 이자 ∙동천유지관리사업 집행 잔액 및 이자 ∙‘19년도 보도 잡초관리 집행잔액 및 이자	∙태화강유지보수사업 집행 잔액 이자 반납 ∙동천유지관리사업 집행 잔액 및 이자	119,245
		행정운영경비		249,150			98,086
			인력운영비	145,230	∙시간외수당 ∙무기계약근로자 급량비, 피복비	∙시간외수당 ∙무기계약근로자 급량비, 피복비	53,097
			기본경비	103,920	∙일반수용비 ∙시간외 근무자 급식비 ∙관내 출장여비 ∙부서운영 업무추진비	∙일반수용비 ∙시간외 근무자 급식비 ∙관내 출장여비 ∙부서운영 업무추진비	44,989

Ⅲ. 2021년도 주요업무계획 및 실적

체계적인 건설행정 추진

□ 추진방향

○ 국·공유재산의 주기적인 실태조사를 통한 행정재산 활용도 증대

○ 국·공유재산 사용허가 및 도로점용의 체계적인 관리로 대주민 행정신뢰성 제고 및 세외수입 확충

□ 추진실적

○ 국·공유재산 실태조사 : 5 ~ 9월

∙ 공부대사 : 재산전산자료, 등기부등본, 토지대장 등

∙ 현장조사 : 공부 불일치 재산 확인, 사용현황 조사 등

∙ 국ㆍ공유재산 관리대장 반영

○ 국·공유재산 사용허가

∙ 국·공유재산 사용료 정기분 부과 : 4월, 1,047건, 346백만원

∙ 국·공유재산 사용허가 접수 및 허가 : 수시, 연 79건

∙ 무단점용에 따른 변상금 부과 및 원상복구 조치 : 수시 5건

○ 도로점용 관리

∙ 도로점용료 정기분 부과 : 6월, 999건, 1,097백만원

∙ 도로점용(영구, 일시) 접수 및 허가 : 수시, 연 491건

∙ 무단적치물 단속반 운영 : 연중, 2명

□ 향후계획

○ 국·공유재산 및 도로점용 허가 : 수시

○ 무단적치물 단속반 운영 : 연중, 2명

도로편입 미지급용지 보상으로 민원 해소

□ 추진방향

○ 보상대상 : 미지급용지 10필지, 837㎡

○ 보상기준 : 20m이하의 구도, 소방도로 공공사업에 편입되었으나

보상금을 지급하지 아니한 토지

(마을안길, 새마을사업 등에 의한 토지 제외)

○ 편성예산 : 300,000천원

□ 추진실적

○ 보상필지 : 호계동 731-5 외 4필지(227㎡)

○ 보상인원 : 18명(공유자 포함)

○ 보상금액 : 198,592천원

□ 향후계획

○ 연암동 313 외 4필지(610㎡) 보상추진

∙ 감정평가 : 10월

∙ 보상금지급 : 11 ~ 12월

○ 미지급용지 보상신청 접수 : 수시

이용자 중심의 도로환경 조성

□ 추진방향

○ 보행자 및 운전자 우선의 안전하고 편안한 도로환경 조성

○ 지속적인 도로 안전시설물 점검·정비로 주민 편익 제고

□ 추진실적

○ 2021년 긴급도로 복구공사 단가계약 운영(연중)  / (‘21. 1. ~ 12.)

○ 2021년 도로변 풀베기 공사 단가계약 운영(연중) / (‘21. 5. ~ 12.)

○ 동별 주민참여예산 소규모 사업 / (설계: ‘21. 2. 공사: ‘21. 5. ~ 6.)

○ 도로포장 보수 및 도로안전시설물 설치(연중) / (‘21. 1. ~ 12.)

□ 향후계획

○ 성혜마을 노후도로 정비(설계: 시행 중 / 공사: ‘21. 11.)

○ 호계중학교 보행안전시설 설치(‘21. 10.)

설해대비체계 확립으로 선제적 재난대응

□ 추진방향

○ 사전 철저한 대비체계 구축으로 신속한 상황 대처

○ 도로 안전성 확보로 주민 생명 및 재산 보호

□ 추진실적

○ 설해집중대비 계획 수립(집중대비기간 : ‘21. 12. 1. ~ ’22. 3. 15.)

○ 제설함 일제 점검(진행 중, ‘21. 10. 12. ~ 11. 26. / 272개소)

○ 중점관리노선 지정 운영(구역별 담당 지정)

∙ 국도 7호선 외 7개 노선

(국도31호, 염포로, 아산로, 동천서로, 오토밸리로, 옥동~농소, 매곡~신흥재)

○ 도로구간별 제설함 비치 및 제설함 내 용품 보충(연중 수시)

○ 자동염수분사장치* 점검(L=2.0㎞ / ‘21. 10.)

* 구도2호선 내(마우나오션리조트 일원)

□ 향후계획

○ 장비 확보 및 작동상태 점검(‘21. 11.)

∙ 다목적 제설차량 3대, 배토판, 염화칼슘 살포기 각 20대(자체확보)

○ 강설 시 비상대응체계 가동

소방도로 개설로 안전한 주거환경 조성

□ 추진방향

○ 도시기반시설 확충을 위한 소방도로 조기 개설로 주민만족도 제고

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업개요	총사업비	사 업 비			추진일정
			기투자	2021	2022이후
계		54,893	11,319	4,625	38,949
천곡본동 일원 (소1-105호선) 도로개설	L=1,025m B=10.0m	5,000	2,502	1,000	1,498	∙‘21. 12. : 착공 ∙‘22. 12. : 준공
호계동 수동중앙길 일원 (소2-136호선) 도로개설	L=558m B=8.0m	8,481	1,617	1,600	5,264	∙‘22. 3. : 착공(1구간) ∙‘23. 1. : 착공(2구간)
신천동 수성천 일원 (중3-84호선) 도로개설	L=576m B=6.0~ 12.0m	4,074	-	-	4,074	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
호계동 팔팔장여관 일원(소2-151호선) 도로개설	L=110m B=8.0m	2,310	20	-	2,290	∙‘23. 6. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
중산동 화정마을 (중2-76호선) 도로개설	L=1,023m B=15.0m	6,788	-	-	6,788	∙‘23. 7. : 착공 ∙‘24. 6. : 준공
창평동 원지마을 일원 (소3-184,187호선) 도로개설	L=118m B=4.0m	690	190	500	-	∙‘21. 7. : 착공(1구간) ∙‘21. 10. : 준공(1구간)
무지개아파트 일원 (소2-96호선) 도로개설	L=330m B=8.0m	5,000	2,000	-	3,000	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
양정동 소로3-231호선 도로개설	L=452m B=6.0m	4,700	60	300	4,340	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
매곡동 매곡공원 일원 (소2-27,2-28호선) 도로개설	L=100m B=8.0m	1,950	900	300	750	∙‘21. 12. : 착공 ∙‘22. 6. : 준공
신천동 일원 (소2-84호선) 도로개설	L=100m B=8.0m	1,700	15	-	1,685	∙‘23. 6. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
신천동 제네4길 일원 (소2-86호선) 도로개설	L=100m B=8.0m	1,600	515	500	585	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 6. : 준공
신천동 제내마을 일원(소2-88, 2-90호선) 도로 개설	L=100m B=8.0m	1,900	-	-	1,900	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 6. : 준공
양정동 일원(소로2-593 ,소3-224, 소3-225호선) 도로 개설	L=130m B=6~8m	2,400	-	-	2,400	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 6. : 준공
양정동 수양버들 주차장 일원 도로개설	L=146m B=6.0m	2,300	-	50	2,250	∙‘23. 6. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공
송정지구 외부관로 및 상부도로 개설	L=360m B=10.0m	3,500	3,500	-	-	∙‘21. 5. : 착공 ∙‘22. 1. : 준공
어물동 복골마을 진입도로 확장 개설	L=1.9㎞ B=6.0m	2,500	-	375	2125	∙‘23. 1. : 착공 ∙‘23. 12. : 준공

□ 기대효과

○ 도로개설로 주거환경 개선 및 주민생활 편익 제공

구민건강 증진을 위한 자전거인프라 구축

□ 추진방향

○ 자전거도로 및 시설물 유지관리 등 정비

○ 자전거 이용 활성화를 위한 각종 시책 추진으로 이용 인구 저변 확대

○ 자전거 도로 현황조사를 통한 데이터 베이스 구축

□ 추진실적

○ 자전거 이용자 상해보험 가입 : ‘21. 2. 27. ~ ’22. 2. 26.

∙ 대    상 : 관내 주민등록을 두고 거주하는 모든 주민(연중)

∙ 보험내용 : 자전거사고 사망, 후유장애, 진단위로금, 벌금, 형사합의금 등

∙ 사 업 비 : 146,194천원

○ 동천 자전거도로 정비공사 시행

∙ 위    치 : 상안동 358-10번지 일원

∙ 사 업 비 : 300,000천원(시비보조금)

∙ 사업기간 : 7 ~ 12월

□ 향후계획

○ 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 시행

∙ 위    치 : 동천 자전거도로 일원(L=24.17㎞, B=3.0m)

∙ 사 업 비 : 400,000천원(특교세 200,000천원, 구비 200,000천원)

∙ 사업기간 : 11 ~ 12월

□ 기대효과

○ 안전하고 쾌적한 자전거 인프라 구축

주민을 위한 안전하고 쾌적한 하천공간 조성

□ 추진방향

○ 하천환경 개선 및 조성하여 주민들의 친수 공간 확대

○ 하천 재해예방 및 피해하천 긴급복구 시행

○ 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	사 업 규 모	사 업 비	비 고
계		634,000
하상정비용 장비임차	관내 51개 하천	90,000
하천 시설물 정비사업	하천 시설물 정비 1식	250,000
하천 응급복구공사	하천 응급복구 1식	50,000
지방하천 유지관리사업	지방하천 유지관리사업	200,000	시비
태화강 억새단지 관리	억새단지 관리 A=105,070㎡	44,000	시비

□ 추진실적

○ 하천 시설물 정비 및 응급복구공사 : 3 ~ 12월(300,000천원)

○ 태화강 억새단지 관리 및 지방하천 유지관리 : 4 ~ 12월(244,000천원)

○ 하상정비 등 장비임차 : 1 ~ 12월(90,000천원)

□ 향후계획

○ 지방하천, 소하천 제방 등 하천시설 사전 점검

○ 하천시설 집중호우 피해예방 위한 복구공사 시행

운곡천 지방하천 정비사업

□ 추진방향

○ 위    치 : 운곡천(어물동 1246-1번지 일원)

○ 사업규모 : 운곡천(L=3km) 하천정비공사 1식(북·동구)

∙ 제방축제(L=594m), 교량1개소, 인도교 1개소, 데크교(L=110m)

○ 사업기간 : ‘20. 6. ~ ’22. 12.

○ 사 업 비 : 2,839백만원(시비 2,129백만원, 구비 710백만원)

□ 추진실적

○ ‘20. 6. 19. : 실시설계용역 착수

○ ‘21. 6. 23. : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘21. 10. : 토지보상 진행

○ ‘22. 12. : 공사준공

구민 중심의 하수도 인프라 조성

□ 추진방향

○ 우·오수 분리 및 하수시설물 유지관리

∙ 오수관로 복구 및 준설공사, 우수관로 보수 및 준설공사

○ 시례천 하수관로 보수공사

○ 공공하수도 실태조사용역

∙ 호계천 수계, 진장명촌지구, 강동산하지구 공공하수도 및 배수설비 실태조사용역

○ 효문공단 내 오수관로 부설공사

□ 추진실적

(단위 : 천원)

구 분	사 업 규 모	사 업 비	비 고
계		1,990,000
관내 하수시설 긴급 복구공사 (1구역)	하수시설물 보수	500,000	시비
관내 하수시설 긴급 복구공사 (2구역)
긴급하수도 준설공사(1구역)	하수관로 준설	500,000	시비
긴급하수도 준설공사(2구역)
하수도 준설공사	우수관로 준설	50,000	구비
하수관로 보수	하수관로 보수	50,000	구비
	하수관로 보수 및 준설	50,000	구비(추경2회)
하수관로 보수·정비공사	하수관로 보수 및 준설	90,000	구비
		50,000	구비(추경1회)
시례천 하수관로 보수공사	오수 압송관로 부설, 오수관로 부설, 맨홀펌프장 설치 등	150,000	시비
효문공단 내 오수관로 부설공사	1구간 – 오수관로부설 217m 2구간 – 오수관로부설 163m	300,000	시비
공공하수도 실태조사용역(호계천, 진장명촌, 강동산하지구)	공공하수도 및 배수설비 실태조사	250,000	시비

□ 향후계획

○ ‘21. 10. : 하수관로 보수 및 준설공사 준공

○ ‘21. 10. : 하반기 하수관로 부설공사(추경2회) 착공

○ ‘21. 11. : 공공하수도 실태조사용역  준공

○ ‘21. 12. : 준설 및 복구공사(연간단가), 효문공단 내 오수관로 부설공사 준공

안전하고 밝은 거리환경 조성

□ 추진방향

○ 고효율 가로등기구 및 노후 등주 교체로 안전사고 예방광 에너지 절감

○ 밝은 거리 조성을 위한 효율적인 유지관리

□ 추진실적

○ 통합관리시스템에 의한 유지보수

∙ 보수실적 : 가로등 1,237건, 보안등 1,069건, 터널등 15건

○ 가로·보안등 신규 설치 및 교체

∙ 관내 보안등(1, 2회) 신규 설치 : 53등

∙ 고효율 가로등기구 교체공사 : 81등

∙ 동천 자전거도로 고효율 가로등기구 교체공사 : 114등

∙ 가로등 자동점멸기(양방향) 교체 : 10개소

∙ 천곡 LED 볼라드 설치공사 : 18등

∙ 고효율 가로등기구(2회) 교체공사 : 93등

∙ 노후 가로등 교체공사 : 63본(LED 150w)

∙ 노후 등기구 및 분전함 교체공사 : 가로등기구 78등, 분전함 10면

∙ 노후 가로등기구 교체공사 : 337등

□ 향후계획

○ 신속하고 정확한 가로·보안등 유지관리 : 연중

○ 관내 보안등(12월) 신규설치 : 47등 예정

송정지구 외부관로 및 상부도로 개설사업

□ 추진방향

○ 위    치 : 송정동 및 창평동 일원

○ 사업내용 : 하수관거 설치(L=360m), 도로개설(B=10m, L=360m)

○ 사업기간 : ‘20. 8. ~ ’22. 1.

□ 추진실적

○ '20. 10. 12. : 업무 위수탁 협약(↔한국토지주택공사)

○ '20. 11.  2. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 요청

○ '20. 12. 16. : 2020년 제3회 도시계획위원회 심의

○ '20. 12. 28. : 기본 및 실시설계 완료(LH)

○ '20. 12. 30. : 지적 현황측량 의뢰(한국국토정보공사)

○ '21.  1. 14. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ '21.  1. 25. : 지적 분할측량 의뢰(한국국토정보공사)

○ '21.  2.  2. : 지정문화재(박상진 생가) 현상변경 허가(울산광역시)

○ '21.  2.  9. : 매장문화재(골말유적) 표본조사 시행

○ '21.  2. 17. : 편입토지 및 지장물 보상계획 열람 공고

○ '21.  5. 12. : 시설공사 착수

○ '21.  5. 24. : 교통시설물 관련 협의 요청(북부경찰서)

○ '21.  7.  6. : 지적분할 측량 완료

○ '21.  7. 14. : 토지이동 신청(민원지적과)

○ '21.  9.  2. : 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가(분할면적 반영)

○ '21.  9. 17. : 지적분할 공부정리 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 1. 준공 및 개통

□ 기대효과

○ 송정지구~곡리마을 도로기반시설 확충으로 마을 주민의 정주여건 및 교통편의성 확보

어물동 복골마을 진입도로 확장

□ 추진방향

○ 위    치 : 어물동 58-12번지 일원

○ 사업내용 : 도로확장(L= 2.2km, B=3.0 → 6.0m)

○ 사업기간 : ‘21. 1. ~ ’23. 12.

○ 사 업 비 : 2,500,000천원(국(균) 2,000,000 구 500,000)

□ 추진실적

○ '20.  3. : 개발제한구역 주민지원사업 신청(국토교통부)

○ '20.  9.	: 사업 선정

○ '20. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사

○ '21.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '21.  4.	: 재해영향성 검토 및 소규모 환경영향평가 용역, 소규모재해영향평가 착수

□ 향후계획

○ '21. 12. : 도시관리계획 반영 및 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ '22.  1.	: 편입토지 및 지장물 보상 착수

○ '23. 1. ~ 12. 시설공사

□ 기대효과

○ 긴급재난상황 발생 시 원활히 대형 차량 진출입이 가능하여 안전한 정주여건 조성

○ 해당 도로가 미포산업로에서 동해안로까지 연결되어 교통분산 효과 및 교통편익 증진

Ⅳ. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 부서총괄

건 명		계	완 결	추진중	불 가	비 고
계		4	2	2
건의 사항	소 계	4	2	2
	매곡천 친수환경 관리 내실화		○
	관내 소방도로 개설 조기 추진			○
	우수관로 관리 및 도로 배수 철저			○
	하천 및 하천 시설물 정비		○

□ 처리결과

구 분	시정요구·건의사항	처 리 내 용	처리 결과
건의	① 매곡천 친수환경 관리 내실화 - 매곡천 친수환경 조성 사업을 준공하였는데, 실개천 부유물로 인한 관로 막힘 및 녹조 현상에 대하여 철저히 관리하여 깨끗한 계류시설이 되도록 하여 주시고, 연차적인 사업 추진을 통하여 주민이 많이 찾는 친수공간으로 조성하기 바람. ② 관내 소방도로 개설 조기 추진 - 신기마을, 천곡본동, 무지개아파트 일원, 신천동 소2-84ㆍ86호선, 무룡고교 일원 등 관내 여러 소방도로가 개설 중에 있는데 주민의 안전한 주거환경 조성을 위해 예산 확보 및 공사 추진에 많은 노력을 하여 주기 바람.	∘매곡천 계류시설 기간제 근로를 통한 환경정비 등 철저한 유지관리를 통하여 관로 막힘 및 녹조 현상 방지 진행중 ∘국시비 등 예산 확보하여 조기에 사업추진예정	완결 추진중

구 분	시정요구·건의사항	처 리 내 용	처리 결과
건의	③ 우수관로 관리 및 도로 배수 철저 - 오토밸리로 줌파크 진입로, 강동 농협 앞 등은 우수기에 물이 많이 고이고 있으니 조치하여 주시고, 배수로 준설도 우수기가 되기 전에 철저히 준설하여 주기 바람. ④ 하천 및 하천 시설물 정비 - 달천운동장 일원 상안천 제방 정비, 천곡천 생태하천 개선 및 중간 진입로 확보, 매곡천 폐쇄된 맨홀뚜껑 정비 등 하천 및 시설물 관리에 만전을 기해주기 바람.	∘ 강동 농협 일원은 ‘21년 상반기 농협 앞 측구 준설, 정차천 인근 우수관로 및 집수정 설치 완료함. 완전한 침수 해소를 위해서는 정자 로터리에서 정자천까지 배수관로 확장 필요 -2022년 당초예산 확보 후 개선 ∘상안천 제방 및 매곡천 폐쇄 맨홀뚜껑 정비, 천곡천 개선 및 중간 진입로 확보 완료	추진중 완결

Ⅴ. 2020. 10. 1. ~ 2021. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황 : 해당없음