중(장)단기 하천 정비계획

□ 하천현황

○ 관내하천

총 계	국가하천	지방하천	소하천	비 고
51	태화강 (1)	동천 외 (20)	이원천 외 (30)

○ 하천정비계획 수립현황

국가하천		지방하천		소하천		비 고
수립	미수립	수립	미수립	수립	미수립
1	0	20	0	30	0

□ 중(장)단기 하천정비계획

(단위 : 백만원)

하천명	계	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년이후
합계	8,000	1,435	20	3,900	1,005	1,640
명촌․연암천	4,000	1,350	-	2,400	250
매곡천	2,000	-	20	500	500	980
천곡천	2,000	85	-	1,000	255	660

중(장)단기 하천정비계획 - 1

<동천 하천 정비계획>

□ 동천현황

○ 하천등급 : 지방하천(‘08. 7 국가하천으로의 승격․지정 요청)

○ 하천연장 : 13.9㎞(하폭 110～250m)

○ 종단구배 : 0.27%

○ 주요구조물 : 보 7개, 교량 11개

○ 관 리 청 : 울산광역시

□ 기본계획 수립현황

○ 1989. 5 : 최초 수립, 경남고시 제187호 / 태화강합류점～경북도계 L=13.9km

○ 1999. 2 : 변경, 태화강합류점～시례천합류점 L=5.2km

○ 2005. 3 : 변경, 광역시고시 제2005-18호 / 시례천합류점～상안천합류점 L=2.27km

○ 2009. 1 : 변경, 광역시고시 제2009-30호 / 상안천합류점～경북도계 L=6.43km

□ 기본계획 주요(변경)내용

○ 계획빈도 : 80년(당초)⇒100년(변경)

○ 신천지구(홈플러스맞은편) : 하천예정지(당초)⇒하천구역(변경)

□ 추진 중인 사업현황

공 사 명	위 치	공사개요	사업기간	사업비 (백만원)	시행청
계				318
동천 하천정비공사	신상안교 ~ 신답보	절토 34,355㎥, 잔토처리 30,980㎥	‘09.4~‘09.12	118	북구청 (건설과)
동천 마스터플랜 수립 용역	동천 전역 (13.9㎞)	생태환경, 친수공간 조성	’09.2~’10.2	200	울산광역시 (환경정책과)

중(장)단기 하천정비계획 - 2

<동천마스터플랜 수립 용역>

소관부서 : 시 환경정책과

□ 용역개요

○ 위    치 : 동천 본류 전역(13.9㎞)

○ 수행사항

∙ 수질, 수리․수문 그리고 생태계 현황조사

∙ 개발 잠재성을 고려한 중장기 수질예측 및 관리방안 제시

∙ 동천지역 테마별 시민수변공간 조성계획 제시

∙ 동천유역별 접근성 향상 계획 제시

∙ 중장기적인 재원확보 방안 및 하천관리 방향 제시

○ 추진기간 : ’09. 2. 9 ~ ’10. 2. 4

○ 소요예산 : 200백만원

○ 시 행 자 : 울산발전연구원〔조경설계 : (주)해석〕

□ 추진현황

○ ’09. 2.  9 : 용역 착수

○ ’09. 7. 27 : 자문회의 개최

○ ’09. 10월말 : 중간보고회 개최 예정

□ 문 제 점

○ 집중호우 시 유속, 유량 급속히 증가하여 다수의 홍수피해 경험

○ 홍수도달시간 빨라 하천시설물 설치 시 소류력에 대한 안전성 문제 대두

□ 대    책

○ 가급적 고정시설물 지양하고 동천하천정비기본계획에 부합되게 자연생태하천 위주로 계획 수립

○ 동천 상류지역 개발증대에 따른 수질관리방안 및 개발잠재성 제고 및 고품격 수변공간 조성 및 균형있는 친수 휴식공간 창출

중(장)단기 하천정비계획 - 3

<생태하천복원사업 타당성조사 용역>

□ 사업개요

○ 과업대상 : 북구 관내 7개 하천

(명촌천, 창평천, 호계천, 매곡천, 천곡천, 약수천, 이화천)

○ 과업기간 : ‘08. 11. 26 ~ ’09. 11. 25

○ 수행기관 : 울산과학대학 산학협력단

○ 용역금액 : 85,350천원

○ 용역내용 : 하천특성 및 주변여건조사, 하천유지용수 유량조사, 북구 하천특성에 따른 생태하천 복원 기본방향 제시, 시범사업 선정 및 실시설계 등

□ 추진현황

○ ‘09.  6. 11 : 1차 중간보고회

○ ‘09.  9. 17 : 21C 구정발전협의회 자문

○ ‘09. 10.  7 : 2차 중간보고회

□ 문 제 점

○ 6개 하천이 건천으로 하천유지수 확보를 위한 가동보, 차수층 설치로 인해 많은 예산이 수반됨

○ 시범사업 구간으로 매곡천을 실시설계 하도록 되어 있으나, 유지수 확보가 시급함

□ 대    책

○ 향후 용역결과를 토대로 필요하천을 대상으로 우선 예산확보 추진

○ 저수지활용과 하도개선(저수호안, 저수로, 하상정리), 간이상수도 사용으로 일부 유지수 확보 가능

중(장)단기 하천정비계획 - 4

<명촌․연암천 생태하천 조성 사업>

소관부서 : 시 환경정책과

□ 사업개요

○ 위    치 : 명촌천, 연암천 구간

○ 사업기간 : ’08. 6. ~ ’12. 12.

○ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

○ 사업내용

구 분	구 간	내 용	소요예산 (백만원)	비 고
◦유입오수 차단사업	연암천(상류)～신명촌교	․차집관로 : 2.5㎞ ․우수토실 : 17개소	1,000
◦하상준설 및 저수로 정비	연암2교～신명촌교	․준설 및 정비(1.8㎞)	2,000
◦수생식물 식재 및 습지정화시설	연암2교～신명촌교	․호안정비 및 수생식물 식재 ․생태습지 조성	1,000

○ 금회 사업량(2009년)

∙ 명촌천 : 오수관로 D800 L=636m, 오수맨홀 13개소, 생태블럭 L=304m

∙ 연암천 : 오수관로 D800 L=345m, D600 L=780m, 오수맨홀 26개소

○ 공 정 율 : 연암천(95%), 명촌천(58%)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원*	총사업비	기투자	2009*	2010	2011	2012	2013	향후 투자
계	4,000		1,350		2,400	250
일반국고보조	2,400		200		2,200
균특․광특보조
기금보조
시 도 비	1,150		1,150
자체재원(구비)	450				200	250
(민 자 등)

□ 추진현황

○ ’08. 8 ～ ’09. 2 : 기본 및 실시설계

○ ‘09. 4 : 공사 착공

□ 문 제 점

○ 명촌천 일부구간 하천미개수로 하천개수공사 선행 후 생태하천 시행 필요

□ 대    책

○ 시 환경정책과 “유입오수 차단사업” 우선 시행(2009년도)

○ 나머지 2개 사업은 하천개수공사 시행 후 시행 : 북구 건설과

중(장)단기 하천정비계획 - 5

<천곡천 생태하천 조성 사업>

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 상안동 상안초 ~ 천곡동 홈플러스 일원

○ 사업내용

∙ 하천환경정비 L=1.14㎞

∙ 자연형호안조성, 자연학습장, 식생군락, 비오톱, 산책로 등

∙ 사업기간 : 2010 ~ 2014

∙ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,200 시비 400, 구비 400)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원*	총사업비	기투자	2009*	2010	2011	2012	2013	향후 투자
계	2,000		85		1,000	255	260	400
일반국고보조	1,200				600	180	180	240
균특․광특보조
기금보조
시 도 비	400				200	60	60	80
자체재원(구비)	400		85		200	15	20	80
(민 자 등)

□ 추진현황

○ ‘08.  8. 20 : 지방하천 생태하천조성사업 기본계획수립 자료제출

(구 → 광역시)

○ ‘08. 11. 26 : 생태하천 복원사업 타당성조사 용역 착수

○ ‘09.  7. 20 : 국․시비 확보 요구를 위해 광역시 방문

○ ‘09.  7. 28 :  2010년 시비확보 지원 요청(구 → 광역시)

□ 문 제 점

○ 국․시비확보사업으로 예산이 수반되어야 하므로 관련부서와 계속적으로 협의

○ 우선 실시설계용역을 실시하여야 하나 예산이 삭감됨

□ 대    책

○ 2010년 5월에 지속적으로 국․시비확보 신청(3회)

○ 우리 구 예산확보도 우선되어야 하며, 실시설계를 통해 관련부서와 협의가 필요

위치도 및 현장사진

위 치 도	현장사진

중(장)단기 하천정비계획 - 6

<매곡천 생태하천 조성 사업>

□ 사업개요

○ 위    치 : 북구 신천동 신천교 ~ 매곡동 매곡교 일원

○ 사업내용

∙ 토지보상 17필지 6,061㎡

∙ 하천환경정비 L=700m

∙ 목재데크, 수변광장, 산책로, 생태습지, 징검다리, 식생군락, 경관조명, 하천유지수(L=2.1㎞)확보

∙ 사업기간 : 2010 ~ 2013

∙ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,208 시비 396, 구비 396)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원*	총사업비	기투자	2009*	2010	2011	2012	2013	향후 투자
계	2,000			20	500	500	980
일반국고보조	1,208				300	300	608
균특․광특보조
기금보조
시 도 비	396				100	100	196
자체재원(구비)	396			20	100	100	176
(민 자 등)

□ 추진현황

○ ‘08. 8. 20 : 지방하천 생태하천조성사업 기본계획수립 자료제출(구→광역시)

○ ‘08. 11. 26 : 생태하천 복원사업 타당성조사 용역 착수

□ 문 제 점

○ 국․시비확보사업으로 예산이 수반되어야 하므로 관련 부서와 계속적으로 협의

○ 2010년도 당초예산으로 준설공사 타당성 용역을 시행할 계획 후 사업을 시행함으로 사업기간이 많이 지연됨

□ 대    책

○ 2010년 5월에 지속적으로 국․시비확보 신청(3회)

○ 우리 구 예산확보도 우선되어야 하며, 준설공사 이후 실시 설계를 통해 관련부서와 협의가 필요

위치도 및 현장사진

위 치 도	현장사진