2011년도 중기지방재정계획(2010~2014)

요약 및 신규사업 설명자료

	울산광역시 북구
	www.bukgu.ulsan.kr

2011년도 중기지방재정계획(2010~2014) 요약

계획기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

기준금액 : 총사업비 10억원 이상 세부사업

※ 10억 미만의 소규모 사업 및 경상적 사업도 재원계획 측면에서 분야별 포괄사업으로 포함

계획안 사업 : 134개 사업 544,838백만원

(단위 : 백만원)

분 야	사업건수	총사업비	비 고
계	134건	544,838
일반공공행정	17건	53,464
교육	3건	8,829
문화및관광	20건	61,741
환경보호	7건	36,525
사회복지	33건	241,222
보건	5건	7,449
농림해양수산	15건	40,218
산업․중소기업	1건	1,176
수송및교통	23건	61,175
국토및지역개발	10건	33,039

신규계획사업 : 14개 사업 36,569백만원

(단위 : 백만원)

분야	사 업 내 역	해당부서	총사업비	비고
계	7개 분야 / 14개 사업		36,569
문화 및 관광	∙ 매곡 도서관 건립	평생교육과	3,400
	∙ 농소3동 체육센터 건립	문화홍보과	8,000
	∙ 염포생활체육공원 조성		3,400
	∙ 농소운동장 정비공사	시설재난관리과	2,509
환경 보호	∙ 친환경 목욕탕 건립	환경미화과	1,600
사회 복지	∙ 청소년종합센터 건립	문화홍보과	3,000
보건	∙ 필수예방접종 무료화 사업	보건소	1,160
농림 해양 수산	∙ 농업기반시설 정비사업	농수산과	1,000
수송 및 교통	∙ 연암동 809-4번지 일원 소방도로 개설	건설과	1,400
	∙ 염포동 소2-2호선 소방도로 개설		2,500
	∙ 농소1동 소2-324호선 소방도로 개설		1,800
	∙ 농소하수처리장 진입도로 개설		3,800
	∙ 화동마을 공영주차장 조성사업	교통행정과	1,000
국토 및 지역 개발	∙ 천곡천 생태하천 조성사업	건설과	2,000

(문화및관광) 매곡 도서관 건립

ⅠⅤ

사업개요

위    치 : 매곡동 795-35번지 일원(1,945㎡)

기    간 : 2012년 ~ 2014년

규    모 : 연면적 1,000㎡정도(지하1층, 지상3층)

내    용 : 종합자료실, 어린이자료실, 문화강좌실, 열람실 등

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

‘10. 8. 18 : 시유지 분할 매각 승인

‘11. 5월 : ’12년도 광역지역발전특별회계 신청

‘12. 3월 : 사업부지 협의 보상 추진

‘13. 3월 : 공사착공

‘14. 3월 : 공사준공

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 3,400백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		3,400				2,800	600
사업비	공 사	1,856				1,254	600
	보 상	1,400				1,400
	기 타 (용역비 등)	146				146
계		3,400				2,800	600
재원별	국 비	800				800
	시 비	600				600
	구 비	2,000				1,400	600
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

매곡지역은 13,000여명의 인구가 거주하는 신흥 주거지역임에도 불구하고 문화공간이 전무하여 도서관 건립을 통해 문화공간을 확충하고 책읽기 좋은 행복 북구 실현

(문화및관광) 농소3동 체육센터 건립

Ⅰ   장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 천곡동 일원

기    간 : 2011년 ~ 2014년

규    모 : 부지면적 10,000㎡, 건축면적 2,000㎡정도(지하1층, 지상3층)

주요시설 : 수영장, 체육관, 헬스장, 주차장 등

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

‘11. 12월 : 도시계획위원회 체육시설 결정

‘12. 2월 : 토지보상협의

‘12. 7월 : 실시설계용역

‘13. 1월 : 공사 착공(’14. 6월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 8,000백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		8,000			20	2,980	5,000
사업비	공 사	5,000					5,000
	보 상	2,980				2,980
	기 타 (용역비 등)	20			20
계		8,000			20	2,980	5,000
재원별	국 비
	시 비	2,500					2,500
	구 비	5,500			20	2,980	2,500
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

농소3동 일원은 대규모 주택사업으로 인해 급격히 인구가 증가되고 있는 신흥주거지로, 수요에 비해 체육시설이 턱없이 부족하여 체육센터 건립이 시급함.

(문화및관광) 염포생활체육공원 조성

Ⅰ  장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 염포동 일원

기    간 : 2011년 ~ 2014년

조성면적 : 10,000㎡정도

사업내용 : 축구장 1면, 기타 부대시설 등

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

‘11. 12월 : 도시계획위원회 체육시설 결정

‘12. 2월 : 토지보상협의

‘12. 7월 : 실시설계용역

‘13. 1월 : 공사착공(’14. 6월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 3,400백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		3,400			100	3,300
사업비	공 사	1,500				1,500
	보 상	1,800				1,800
	기 타 (용역비 등)	100			100
계		3,400			100	3,300
재원별	국 비	400				400
	시 비	1,500				1,500
	구 비	1,500			100	1,400
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

염포동 일원은 우리나라 굴지의 기업인 현대자동차가 위치하고 있으며, 인구의 대부분이 젊은층으로 주민들이 체육공원 조성을 지속적으로 건의하고 있어, 체육공원 조성이 시급함.

(문화및관광) 농소운동장 정비공사

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 창평동 391-1번지(농소운동장)

기    간 : 2011년 ~ 2012년

내    용 : 본부석과 스탠드 시설개선(기존 시설 철거후 확장설치)

- 보조축구장(마사구장) ⇒ 인조잔디구장 조성(신설)

- 게이트볼장(17×22m, 2면) ⇒ 지붕설치(신설)

- 기존배구장(마사구장) ⇒ 다목적(농구, 배구, 족구)구장(신설)

- 휀스교체(능형망 ⇒ 메쉬휀스)

- 조경 및 기타 배수시설 등 정비(대경목 식재 등)

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

‘11. 2월 ~ 5월 : 실시설계용역

‘11. 6월 ~ ’12. 6월 : 공사추진

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 2,509백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		2,509			509	2,000
사업비	공 사	2,500			500	2,000
	보 상
	기 타 (용역비 등)	9			9
계		2,509			509	2,000
재원별	국 비
	시 비
	구 비	2,509			509	2,000
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

운동장 시설을 개선 및 신규 설치하여 우리 구 대표구장의 면모를  갖추어 운동장 사용 주민의 편의 증진 및 이용자 확대 도모

(환경보호) 친환경 목욕탕 건립

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 중산동 615번지 일원

기    간 : 2010년 ~ 2011년

규    모 : 부지면적 1,165㎡, 건축연면적 780㎡(3층)

시설내용 : 남․여 목욕탕, 헬스장, 주차장 등

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’10. 9. 13 : 음식물자원화시설 주변지역 주민공청회

‘10. 10월 : 주민 의견수렴 및 목욕탕 건축부지 선정

‘10. 11월 : 주민지원기금 사용 결정 승인(주민지원협의체 의결 후 의회 승인)

‘10. 12월 : 목욕탕 건축부지 계약

‘11. 2월 : 부지 및 건물 매입, 실시설계

‘11. 4월 ~ 10월 : 공사추진

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,600백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,600			1,600
사업비	공 사	1,520			1,520
	보 상	(900)		(900)
	기 타 (용역비 등)	80			80
계		1,600			1,600
재원별	국 비
	시 비
	구 비	1,600			1,600
	기 타	(900)		(900)

※ 부지보상비 900백만원은 주민지원기금으로 지원

ⅣⅢⅤ

필요성

음식물자원화시설로 인한 주민갈등 해소

소외된 중산동 주민 복지증진과 건강을 위한 편의시설 제공

(사회복지) 청소년종합센터 건립

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 연암동 361-1번지

기    간 : 2012년 ~ 2013년

규    모 : 부지면적 591.6㎡, 연면적 1,183㎡(지하 1층, 지상 4층)

시설내용 : 진로․취업, 문화활동 등을 지원 할 수 있는 시설

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’11. 9월 : 건물구조, 시설내역 등 청소년수요조사 실시 및 청소년수련시설 건립심의위원회 구성․운영

‘12. 1월 ~ 6월 : 기본․실시설계용역

‘12. 7월 : 공사착공

‘13. 6월 : 준공 및 개관

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 3,000백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		3,000				1,500	1,500
사업비	공 사	2,870				1,370	1,500
	보 상
	기 타 (용역비 등)	130				130
계		3,000				1,500	1,500
재원별	국 비	960				480	480
	시 비	480				240	240
	구 비	1,560				780	780
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

청소년시설이 부족하므로 청소년 진로상담 등 복합문화공감을 마련하여 건전한 청소년 문화 육성

「청소년 활동진흥법」제11조에 시･군･구청장은 청소년 수련시설을 1개소 이상 설치･운영토록 명시 ※ 울산광역시 구․군별 1개소 이상, 우리 구는 없음

부족한 청소년 시설 확충으로 청소년 욕구를 충족시키고, 복합 문화 공간 조성으로 건전한 청소년문화 육성

(보건) 필수예방접종 무료화 사업

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 보건소(예방접종실)

기    간 : 2011년 ~ 2014년

규    모 : 관내 0세군(12개월 미만) 영아(2,101명, 19,329건)

사업내용 : 0세 아동에 대한 필수예방접종의무를 병․의원에 일부 위탁 후 접종 행위수수료(15,000원) 지원

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

필수예방접종(4종/10회) 지원건수 : 19,329건

- BCG(피내 1회) : 420건(대상인구의 30%)

- B형간염(3회) : 6,303건

- DPT(3회) : 6,303건

- 폴리오(3회) : 6,303건

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,160백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,160			290	290	290	290
재원별	국 비
	시 비
	구 비	1,160			290	290	290	290
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

예방접종 비용으로 인한 육아부담을 경감시키고, 예방접종 의료기관 선택권을 제공하여 지역사회 예방접종률 향상

(농림해양수산) 농업기반시설 정비사업

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 관내 농로, 용배수로 등

기    간 : 2011년 ~ 2014년(연례반복)

규    모 : L=20km

사업내용 : 노후, 훼손 농로 및 용배수로 정비

ⅡⅠ   Ⅴ

추진상황 및 향후계획

‘11. 2월 ~ 3월 : 공사설계

‘11. 4월 ~ 7월 : 공사기간

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,000백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,000			200	250	250	300
재원별	국 비
	시 비
	구 비	1,000			200	250	250	300
	기 타

ⅣⅢ

Ⅴ

필요성

농업기반시설(농로, 용배수로) 정비로 농업환경 개선

(수송및교통) 연암동 809-4번지 일원 소방도로 개설

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 연암동 809-4번지(연암3통) 일원

기    간 : 2011년 ~ 2013년

규    모 : 도로개설 L=230m, B=6m

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’11. 1월 : 실시설계용역 착수

‘12. 1월 ~ 12월 : 보상추진

‘13. 1월 : 공사착공(’13. 7월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,400백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,400			20	875	505
사업비	공 사	505					500
	보 상	875				875
	기 타 (용역비 등)	20			20		5
계		1,400			20	875	505
재원별	국 비
	시 비
	구 비	1,400			20	875	505
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

소방도로 개설로 긴급 재난발생 시를 대비하고 원활한 교통소통으로 주민불편 해소

(수송및교통) 염포동 소2-2호선 소방도로 개설

Ⅰ     장애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 염포동 179번지(염포초교) 일원

기    간 : 2011년 ~ 2013년

규    모 : 도로개설 L=160m, B=8m

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’11. 1월 : 실시설계용역 착수

‘12. 1월 ~ ’13. 5월 : 보상추진

‘13. 6월 : 공사착공(’13. 12월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 2,500백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		2,500			20	1,000	1,480
사업비	공 사	500					500
	보 상	1,980				1,000	980
	기 타 (용역비 등)	20			20
계		2,500			20	1,000	1,480
재원별	국 비
	시 비
	구 비	2,500			20	1,000	1,480
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

도시기반시설(상․하수도, 도시가스 등) 확충을 위한 소방도로 개설로 주민불편 해소 및 원활한 차량소통 도모

(수송및교통) 농소1동 소2-324호선 소방도로 개설

Ⅰ     애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 호계동 955-1번지(호계공설시장) 일원

기    간 : 2011년 ~ 2014년

규    모 : 도로개설 L=125m, B=8m

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’11. 1월 : 실시설계용역 착수

‘12. 1월 ~ ’13. 12월 : 보상추진

‘14. 1월 : 공사착공(’14. 7월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,800백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,800			30	500	630	640
사업비	공 사	640						640
	보 상	1,130				500	630
	기 타 (용역비 등)	30			30
계		1,800			30	500	630	640
재원별	국 비
	시 비
	구 비	1,800			30	500	630	640
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

소방도로 개설로 긴급 재난발생 시를 대비하고 원활한 교통소통으로 주민불편 해소

(수송및교통) 농소하수처리장 진입도로 개설

Ⅰ     애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 상안동 73번지 일원

기    간 : 2011년 ~ 2012년

규    모 : 도로개설 L=1.6㎞, B=10m

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

’11. 1월 : 실시설계용역 착수

‘11. 4월 ~ 12월 : 보상추진

‘12. 1월 : 공사착공(’12. 12월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 3,800백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		3,800			1,100	2,700
사업비	공 사	2,700				2,700
	보 상	1,000			1,000
	기 타 (용역비 등)	100			100
계		3,800			1,100	2,700
재원별	국 비
	시 비	3,800			1,100	2,700
	구 비
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

농소하수처리장 건설과 관련하여 진입도로를 개설함으로써 하수처리시설의 유지관리에 만전을 기하여 하천수질보전과 주민 편의 제공

(수송및교통) 화동마을 공영주차장 조성사업

Ⅰ        애아동․가족Ⅴ

사업개요

위    치 : 화봉동 365번지 외 4필지

기    간 : 2011. 1월 ~ 12월

규    모 : 주차장조성(3,602㎡, 120면)

ⅡⅠⅤ

추진상황 및 향후계획

‘10. 12월 : 공유재산취득심의(의회의결요구)

‘11. 1월 : 보상추진

‘11. 9월 : 공사착공(’11. 12월 준공예정)

ⅢⅤ

소요예산 (단위:백만원)

총 사업비 : 1,000백만원

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		1,000			1,000
사업비	공 사	400			400
	보 상	600			600
	기 타 (용역비 등)
계		1,000			1,000
재원별	국 비
	시 비	400			400
	구 비	600			600
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

무룡산 등산로는 주말 등산객이 1,000명/일 정도 이용하고 있으나, 현재 주차시설은 전무한 상태이며,

또한, 무룡산 등산로 입구「화동못 수변공원」을 현재 조성 중에 있어 준공(‘10. 12월)시 향후 이용객이 급속히 증가할 것으로 예상되어 지역 주민들의 민원해소 및 만성적인 주차난을 해소하기 위함

(국토및지역개발) 천곡천 생태하천 조성사업

Ⅰ      위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

Ⅰ      위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

설립개요

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

사업개요

위    치 : 천곡동 천곡천(상안초~홈플러스)

기    간 : 2012년 ~ 2014년

규    모 : 하천환경정비(L=1.14km), 자연형 호안조성, 자연학습장, 식생군락, 산책로 등

Ⅱ         2010. 3월 : 토지 보상 추진

위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

Ⅰ      위    치 : 연암

동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

설립개요

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

추진계획

‘12. 1월 : 실시설계

‘13. 1월 : 공사착공(’14. 12월 준공예정)

ⅢⅠ      위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

Ⅰ      위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

설립개요

사업기   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간   위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

사업기간 ‘08. 5. 20 : 울산외국어고 북구설립 확정

‘08. 5. 30 : 울산외국어고 설립 지원협약 체결(북구청 ↔ 시 교육청)◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원   ◦ 위    치 : 연암동 1144번지 일원(북구청 ~ 화봉택지 연결)

◦ 사업기간 : ‘09. 1월 ~ ’10. 12월

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=215m, B=12m

◦ 총사업비 : 1,760백만원  Ⅴ

소요예산 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014	향후투자
계		2,000				1,000	500	500
사업비	공 사	2,000				1,000	500	500
	보 상
	기 타 (용역비 등)
계		2,000				1,000	500	500
재원별	국 비	1,200				600	300	300
	시 비	400				200	100	100
	구 비	400				200	100	100
	기 타

ⅣⅢⅤ

필요성

획일적이고 삭막한 도심하천을 자연친화적인 친수공간으로 조성하여 주민들에게 편안한 쉼터와 다양한 볼거리를 제공

주변환경과 조화된 맞춤형 생태하천 기본방향 제시