제103회울산광역시북구의회(임시회) 제4호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 행정사무처리상황보고의 건 ○ 종합복지회관 건립 현황 ----------------------------------------- ○ 국민체육센터 건립 현황 ----------------------------------------- ○ 장등마을 체육시설 설치 공사 ------------------------------------- ○ 호계공설시장 시설 현대화사업 ------------------------------------ ○ 건강도시사업 추진계획 ------------------------------------------ (프리젠테이션으로 저장돼 있음)	2면 6면 9면 11면 13면

종합복지회관 건립 현황

□ 추진배경

현대자동차는 울산지역사회에 공헌하고 사회적 책무를 실행하는 일환으로 지역 주민들의 건전한 여가생활과 휴식공간을 제공하기 위하여 종합복지회관을 건립하여 우리구에 기부채납하는 조건으로 2005. 6. 8 쌍방 약정을 체결하였음.

□ 사업개요

○ 위 치 : 연암동 1127-2번지 외 9필지

규 모	부지면적	건축면적	건 축 연면적	주 용 도
지하1/지상4 /1동	9,014㎡	3,375.52㎡	11,564.39㎡	지하1층: 주차장,기계실, 전기실 1층: 수영장, 전시홀, 임대시설 2층: 헬스장, 문화공간 등 3층: 체육관, 탁구장, 예식장 4층: 다목적실, 휴게공간

○ 총사업비 : 200억

○ 사업기간 : 2006. 3. 30 ~ 2009. 6. 30

□ 추진사항

○ ‘05. 06. 08 : 약정체결(북구청, 현대자동차(주), 현대자동차노동조합)

○ ‘05. 10. 28 : 공유재산관리계획(기부채납) 북구의회 의결

○ ‘06. 09. 26 : 건립부지 소유권 이전(소유자 : 울산 북구)

○ ’07. 04. 06 : 문화재 시굴조사 완료

○ ’07. 09. 12 : 현대자동차의 시설(안) 확정

○ ’07. 10. 02 : 현대자동차와 시설협의 간담회 개최

○ ’07. 10. 22 : 실무위원회 개최(제10차) → 시설(안) 협의

○ ’07. 11. 09 : 북구의회 설명회 개최

○ ‘07. 11. 23 : 건축협의 완료 및 기공식 개최

○ ‘08. 4월말 : 공사 착공예정

□ 완충녹지 조성 및 진입도로 추진상황

부서별

추  진  상  황

비 고

도시녹지과

【완충녹지】

○ 조성구간 : 복지회관입구~연암중학교

필지수	면적	사업비	비고
연암동 1124-1외 5필지	1,426㎡	550백만원 ․녹지조성비 150백만원 ․토지매입비 400백만원	느티나무 외 8종 (4,300본)

○ 2005. 09. 23 : 완충녹지 조기 조성 건의

○ 2006. 08. 14 : 2007년 광역시 예산 반영 요구

○ 사업기간 : 2007. 10. 2 ~ 2008. 1. 30

○ 관리이관  : 2008. 2. 18(시⇒구)

완 료

건 설 과

【진입도로】

필지수	면 적	사업비	비 고(단위: 백만원)
연암동 1124-5번지일원 (총 7필지)	2,932㎡	1,770백만원 ․보상비 1,320백만원 ․공사비 400백만원 ․기 타 50백만원	- 특별교부세 600 - 특별교부금 500 - 구 비 670

○ 2005. 09. 05 : 진입도로개설 사업비 검토보고

○ 2006. 01. 19 : 편입토지 분할측량 완료

○ 2006. 03. 31 : 도로 편입토지 감정평가 완료

○ 2007. 03. 09 : 설계용역 착공

○ 2007. 5월  : 사업비 1,770백만원 전액 확보

○ 2007. 10. 05 : 도시계획시설 실시계획인가 신청

○ 2007. 10. 16 : 설계용역 완료

○ 2007. 12. 10 : 공사 착공

○ 2008. 4월 현재 : 성토작업 완료

<향후계획>

○ 2008. 12. 9  : 공사 준공(예정)

추 진 중

□ 문제점

○ 산재환자 재활시설과 비정규직 지원센터는 종합복지회관 건립 목적에 부적합하다는 우리구의 의견과는 달리 현대자동차에서는 노사화합을 고려하여 반영하여 줄 것을 요구하고 있으며,

특히, 비정규직 지원센터는 2004. 7. 16 노사간 합의된 사항으로 적극 반영하여 줄 것을 요구하고 있는 실정임.

□ 향후 추진계획

○ 현재까지 협의되지 않은 산재환자 재활시설과 비정규직 지원센터의 시설 반영여부는 현대자동차와 지속 협의 추진

○ 2009. 6월말 준공예정 : 준공 후 우리구에 기부채납

□ 위치도 및 현황사진

진입도로

북구보건소

산업로

건립부지

완충녹지

국민체육센터 건립 현황

□ 사업개요

○ 건립위치 : 북구 신천동 580번지 등 15필지(신천 근린공원 내)

○ 시설규모 : 토지 7,598㎡(건립부지 4,705㎡, 진입로 2,893㎡)

건물 4,128㎡(지하 1층 지상 3층)

○ 시설내용 : 수영장, 체육관, 헬스장, 다목적실 등

○ 사업기간 : ’05. 7 ~ ’09. 6.

○ 사 업 비 : 7,325백만원(기금 3,000백만원, 시비 2,000백만원,

구비 2,325백만원)

□ 추진사항

○ ’05.  7월 : 국민체육센터 건립협약 체결(공사비 30억원 확보)

○ ’06.  8월 : 시 중기지방재정계획 반영

○ ’06. 11월 : 구 중기지방재정계획 반영(건립위치 변경)

○ ’06. 12월 : 공유재산 취득심의(구정조정위원회)

○ ’07.  1월 : 진입도로 사용동의(금세기디앤씨)

○ ’07.  2월 : 공유재산관리계획 변경계획 의회승인

○ ’07.  3월 : 기본 및 실시설계 용역업체 선정(168,329,255원)

※  임채룡건축사(명촌동 911-7, ☎052-589-8112, 기간 3. 27 ~ 9. 28)

○ ’07.  4월 : 시 투․융자심사 승인

○ ’07.  9월 : 울산광역시 공원조성계획 변경승인

※ 명칭(문화회관→국민체육센터), 위치(신청동 577→580)

○ ’07. 10월 : 기본 및 실시설계 용역(완료)

○ ’07. 10월 : 체육진흥기금 전액교부(’07년도분, 9억원)

○ ’07. 11월 : 공유재산관리계획변경심의(건축증가분, 진입로매입 등)

○ ’07.  8월 : 울산광역시 1회추경 예산교부(5억원 확보)

○ ’07. 12월 : 문화재청 시굴허가(울산문화재연구원)

○ ’07. 12월 : 부지 및 진입로 경계측량

○ ’08.  3월 : 도시계획시설사업 실시계획인가(‘07. 11. 22 ~ ‘08. 3. 12)

○ ’08.  3월 : 감정평가완료, 부지 및 진입로 매입 진행중

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기확보			미확보	비 고
		2005년	2007년	2008년	2008년
계	7,325	25	3,093	2,582	1,625
국 비	3,000	-	900	2,100	-	기금
시 비	2,000	-	500	-	1,500	*시비 1,500(미확보)
구 비	2,325	25	1,693	482	125	*구비 125(미확보)

□ 향후 추진계획

○ ’08. 4월   : 1회 추경시 시비(15억원) 예산편성요구

○ ’08. 4월   : 사업비 부족분 구비확보

○ ’08. 4월   : 계약심사 및 입찰공고

○ ’08. 5월   : 낙찰업체 적격심사 및 계약

○ ’08. 5월   : 공사착공(예정)

○ ’09. 6월   : 공사준공(예정)

□ 문 제 점

○ 시비(15억) 미확보로 사업추진 애로발생

○ 원자재, 물가, 인건비 등의 상승요인이 발생하여 사업비 추가 확보 필요

□ 대    책

○ ’08년 추경시 시비(15억원) 등 예산편성토록 요구

□ 위치도 및 항공사진

위 치 도	항공사진

장등마을 체육시설 설치 공사

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 장등마을 체육시설 설치공사

○ 위    치 : 북구 신현동 산 200번지 일원(무룡산 정상 동쪽 500m인근)

○ 시설내용 : 파고라, 의자, 운동기구(윗몸일으키기 등) 및 산책로 조성 등

○ 사업기간 : ’08. 1 ~ ’08. 12.

○ 사 업 비 : 2억원(개발제한구역 주민지원사업비)

□ 추진사항

○ ’07.  8월 : 예산확보

○ ’07. 12월 : 관련부서 업무협의(예산, 추진부서 변경 등)

○ ’08.  3월 : 국토해양부 도시환경과 업무협의

○ ’08.  3월 : 시 녹지공원과 업무협의(부지무상)

○ ’08.  4월 : 세부사업내역 진행중

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	2007년(기확보)	비 고
계	200	200
국 비	140	140	70%
구 비	60	60	30%

□ 향후 추진계획

○ ’08.  5월  : 세부실시설계 용역발주

○ ’08.  6월  : 계약심사 및 입찰공고

○ ’08.  7월  : 낙찰업체 적격심사 및 계약

○ ’08.  8월  : 공사착공(예정)

○ ’08. 10월  : 공사준공(예정)

□ 문 제 점

○ 강동동 주민들이 개발제한구역내 주민지원사업비인 장등마을 체육시설 설치공사 예산을 타 목적으로 사용 또는 대상지 변경요구

※ 장등마을 주차장 설치 등

□ 대    책

○ 국토해양부와 협의결과, 사업목적 변경없이 현재와 같이 장등마을 등산로에 체육시설물 설치

□ 위치도 및 현장사진

위 치 도	현장사진
	(무룡산 정상 500m지점)
	(무룡산 정상 1000m지점) 달곡 장등 무룡산정상

호계공설시장 시설현대화 사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘08. 7월 ~ ’09. 3월

○ 사 업 비 : 600백만원(국비360, 시비90, 구비150)

○ 사업내용 : 리모델링 및 시설물 추가 설치

□ 추진사항

○ ‘07. 3. 23 : 재래시장 시설현대화사업 균특 예산 신청

○ ‘07. 4. 13 : 시설현대화사업 지역주민․상인 설명회

○ ‘07. 5. 18 : 시설현대화 사업 사전 컨설팅 실시(1차)

○ ‘07. 6. 23 : 시설현대화 사업 사전 컨설팅 실시(2차)

○ ‘07. 8. 14 : 컨설팅 결과 통보 및 접수

∙ 내부 리모델링을 최우선과제로 추진

○ ‘08. 1. 28 : 시설현대화사업 국고보조금 교부신청 및 집행계획서 제출

○ ‘08. 3. 25 : 시설현대화사업 국고보조금 교부결정 통보

○ ‘08. 4. 15 : 시설현대화사업 주민설명회 개최

∙ 지역주민 및 상인회 시설 리모델링 필요성 인정

∙ 공사에 따른 영업 공백 최소화 요구

※ 지역주민 막구조 설치 부정적, 상인회 생계대책 요구

□ 향후계획

○ 실시설계용역 발주 : 5월초

∙ 실시설계를 토대로 공사기간 단축방안 등 강구

○ 실시설계용역 결과 설명회 : 6월초

○ 공사착공 : 7월초

○ 공사준공 : 12월말

호계공설시장 조감도

호계공설시장 위치도

건강도시사업 추진계획

□ 추진배경

지역사회 구성원의 참여와 협력을 바탕으로 건강도시사업의 체계적 추진과 주민의 신체적, 정신적, 사회적, 환경적 안녕을 추구하고 건강형평성 보장은 물론 쾌적한 도시 환경 속에서 건강한 삶을 영위할 수 있도록 하고자 함

□ 사업개요

○ 환경문제의 대두와 보건의식의 변화

○ 건강수준과 삶의 조건이 좋은 건강도시 사업추진

○ 신체적 사회적 정신적으로 완전한 안녕 상태

□ 추진사항

○ 2007. 11. 05. 건강도시 운영조례 제정

○ 2007. 11. 15. WHO 건강도시 연맹 정회원 인정(가입)

○ 2008. 02. 04. 건강도시사업 추진 협의회 개최(북구청 실과별)

○ 2008. 03. 04. 건강도시사업 추진계획 보고회 개최(전 직원)

□ 문제점

○ 건강도시 심포지움 개최를 위한 예산 미확보

□ 향후 추진계획

○ 2008. 05월  건강도시 운영위원회 구성

○ 2008. 10월 중 건강도시 심포지움 개최

○ 2008. 10. 23~10. 26 건강도시연맹 제3회 총회 참석(일본 이치가와시)

□ 기타

○ 보고자료(프리젠테이션) 별첨1부

(